투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	슬러지재활용과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통지-제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사

슬러지재활과-5533(2014.10.01)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 통지합니다.

가. 계약건명 : 제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사

나. 계약금액 : 증 금42,099,000원(금사천이백구만구천원)

- 변 경 : 금513,656,000원(금오억일천삼백육십오만육천원)

- 당 초 : 금471,557,000원(금사억칠천일백오십오만칠천원)

다. 계 약 일 : 2014년  06월  10일 (변경계약일 : 2014년 10월 02일)

라. 착 공 일 : 2014년  06월  10일

마. 준공기한 : 28일 연장

- 변 경 : 2014년  11월  04일

- 당 초 : 2014년  10월  07일

바.  변경사유 : 내벽 철판 부식으로 가스홀다 내벽 PLATE 추가 제작 설치

사. 계약업체 : 진명환경산업(주)

사업자등록번호 113-81-58700

(☎ 02-2671-4613)

붙임  1. 변경계약서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	10/06 김홍덕
협조자
시행	관리과-11909	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개