투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	IT Complex 책임감리자
(경유)
제 목	하도급계약 변경사항 처리 알림(IT-COMPLEX 건립공사)

1. 상암ITC감 제14-95호(2014.10.6)와 관련입니다.

2. 위 대호로 우리 본부에 검토보고 한「IT COMPLEX 건립공사」의 하도급계약 변경사항(철근콘크리트공사)에 대하여 아래와 같이 처리되었음을 통보하오니 공사관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 하도급 계약내용 변경 내용

구분	하도급 공사명	하도급 업체명 (대표자)	변경내용				변경사유
			하도급 기간	원도급 금액(원)	하도급 금액(원)	하도급율 (%)
당초	철근콘크리트공사	원영건업(주) (노석순)	‘10.05.01 ~‘14.10.06	13,305,339,303	12,945,485,730	97.3	하도급 준공 정산계약 및 잔여공사분 직영공사 처리
변경	〃	〃	‘10.05.01 ~‘14.09.04	13,274,088,759 (감 31,250,544)	12,837,994,400 (감 107,491,330)	96.7

끝.

								서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김민규				건축총괄과장					강성욱					건축부장					10/06 김우성
협조자				주무관							장충근
시행			건축부-11892										(						)		접수												(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)																/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2606							/전송			02-3708-2659					/	skyrat@seoul.go.kr													/	대시민공개