문서번호	인재기획과-12814
결재일자	2014.10.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
김홍태		김종엽	10/06 박기용
협조
	주무관		한성훈

인재개발원 생활관 승강기설치공사 및 부대공사

변경사항 및 준공검수 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

인재개발원

(인재기획과)

인재개발원 생활관 승강기 설치공사 및 부대시설공사

변경사항 및 준공검수 실정보고

생활관 승강기설치 및 부대공사의 효율적이고 합리적인 공사수행과 신속한 공사추진을 위해 경미한 변경 등에 대하여 변경 시공한 사항을  실정보고하고 공사완료 및 준공검수에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사현황

공사명 : 인재개발원 생활관 승강기설치공사 및 부대시설공사

- 공사개요 : 생활관 장애인 전용승강기 설치(1~2층, 수직형 휠체어리프트), 1층 구내식당 천장보 구조보강,  2층 장애인숙소(208호) 구조개선(샤워실 설치 등)

- 공사기간 : 2014. 8. 5. ~ 9.28

- 도급업체 : (주)성보엔지니어링 대표 정달홍

- 도급액 : ₩57,215,130원(오천칠백이십일만오천일백삼십원)

Ⅱ		변경내용

〈건축 분야〉

공사장 가설물(임시가림막) 변경 : 증 17㎡

- 1, 2층 장애인리프트 설치구간 : 샌드위치판넬 59㎡→76㎡

방염시트지 붙임 물량증가 : 증 31㎡

- 1층 화장실 복도 및 승강기 프레임 외부 : 4㎡→35㎡(증31㎡)

장애인 점자블럭 설치 : 감 17장

- 1층 출입로 부분 감소 : 400장 → 383장

승강로 설치로 인한 슬래브 철거부분 구조보강

- H형강 : 웹,플랜지 치수감소 300×200→200×200(웹 치수 감소            300→200), 길이증가 2,100→2,500(400㎜증가)

〈기계설비 분야〉

급탕배관 선형 변경 및 길이 증가(약 5m)

- 장애인숙소(208호) 샤워실 설치 등 구조개선공사 중 설계도면   적용 시 급탕배관 설비공사가 곤란함에 따른 배관 선형 변경

〈세부내용〉

물량 증‧감 내역

분 야 별	증	감
건축분야	- 공사장 가설물(임시가림막) 샌드위치판넬 : 증 17㎡ - 방염시트지 붙임 물량증가 : 증31㎡	- 장애인 점자유도블럭 설치 : 감 17장 - 슬래브 철거부분 구조보강 : H형강 웹치수 감소, 길이 증가
기계설비분야	- 급탕배관 선형 변경 및 길이 증가(약 5m)

분야별 변경금액 : 금액변경 없음(경미한 수량변경)

Ⅲ		처리의견

생활관 승강기설치 및 부대공사의 효율적이고 합리적인 공사수행과 신속한 공사추진을 위해 경미한 변경이 이루어진 바 있으나,

당초 계약금액 범위 내에서 공사 금액의 변경없이 변경 공사가 수행됨에 따라 변경에 관한 계약 없이 정산하고 준공검수코자 함.

보고자 : 지방시설(건축) 6급   김 홍태

지방공업(기계) 7급   한 성훈

따로붙임 : 감리검토의견서 1부.  끝.