투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 도로부속시설물 유지보수공사 설계변경(2회) 시행

우리 사업소에서 시행 중인 『2014년 도로부속시설물 유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 도로부속물 유지보수공사

나. 공사기간 : 2014.03.14.∼ 2015.02.28.

다. 도 급 자 : ㈜하현테크 대표자 임하태

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증 ․ 감	비 고
총공사비		395,155,130	472,031,410	증 76,876,280
도급비	공급가액	321,050,119	346,357,391	증 25,307,272
	부가가치세	32,105,011	34,635,739	증 2,530,728
	계	353,155,130	380,993,130	증 27,838,000
관급비		39,760,000	88,798,280	증 49,038,280
이설비		2,240,000	2,240,000	-

마. 설계변경 사유

- 현장 여건에 따른 단순 시공물량 변경

- 대건로 차량용 방호울타리 설치(L=416m)

바. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로시설물 안전관리 및 수준향상, 도로 및 도로부속물관리, 차량방호울타리 및 중앙분리대 정비(품의 도로: 77)

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 보고서 2부. 끝.

주무관	김영용		도로보수과장	10/06 이규철
협조자	주무관	이상하		주무관	이경남		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-8894	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8351	/전송	300-8364	/	2009024248@seoul.go.kr	/	대시민공개