문서번호	도로보수과-4466
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
홍수종	10/06 국중진

작업완료 보고서(제5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업완료보고

□ 공사 일반현황

○ 공  사  명 : 2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공 사 개 요 : 소규모 포장복구 : 91a, 절삭후덧씌우기 : 197a

○ 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 2. 28

○ 착  공  일 : 2014. 3. 28

○ 준공예정일 : 2015. 2. 28

○ 도  급  자 : 한림토건  이현숙

○ 도 급 비 : 885,214,000원

□ 보고현황

【5차】

○ 5차 작업지시

- 작업지시일 : 2014. 6. 13

- 작업지시내용 : 마장동 498-2앞 외 4개소

(굴착복구A-1 : 11.67a, 차로단위복구 : 21.5a)

○ 작업완료 내용(5차)

- 작업지시일 : 2014. 9. 30

- 작업지시내용 : 마장동 498-2앞 외 4개소

(굴착복구A-1 : 23.39a, 차로단위복구 : 23.55a)

지시 번호	위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
5-1	마장동 498-2~ 773-1	A-1	1.2	315.0	378.0	1.2~9.0	379.9	561.47
		평삭(A-1)	3.5	315.0	1,102.5	2.9~7.0	327.0	1,169.3
5-2	행당동 40-15	A-1	1.2	9.0	10.8	1.2~2.3	22.0	33.44
5-3	군자동 동일로206 ~ 광나루로337	A-1	3.0	250.0	750.0	1.3~4.5	545.0	1,744.38
		평삭(A-1)	4.0	250.0	1,000	1.0~6.6	269.6	1,185.88
5-4-1	마장동 827	A-1	1.2	2.0	2.4			5-1에 포함
		평삭(A-1)	2.0	2.0	4.0
5-4-2	마장동 827	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-3	마장동 817	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-4	마장동 817	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-5	마장동 773-2	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-6	마장동 773-2	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-7	마장동 773-7	A-1	1.2	2.0	2.4
		평삭(A-1)	2.0	2.0	4.0
					1.167.6 (2,150.5)			2,339.29 (2,355.18)

○ 작업현황

□ 조치사항

○ 위 내용과 같이 복구 완료된 구간에 대하여 추후 설계변경에 반영하여         준공처리 하고자 합니다.

붙임 : 작업완료보고서 1부. 끝.