문서번호	교량보수과-3816
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
배상현		김환겸	10/06 송상영
협조

자동차전용도로 일상유지보수공사 설계변경(제2회) 검토보고

2014. 10

동부도로사업소

(교량보수과)

자동차전용도로 일상유지보수공사 설계변경(제2회) 검토보고

우리사업소에서 시행중인 2014년 자동차전용도로 일상유지보수공사와 관련,

설계변경 사항이 있어 검토후 보고 드림.

※ 관련근거 : 교량보수과-3691호(2014.09.26.)

⇒ 자동차전용도로일상유지보수공사 집행잔액 활용계획 보고

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 2014년 자동차전용도로일상유지보수공사(연간단가)-동부

공사기간 : 2014년 04월 07일~2015년 02월 28일

도 급 비 : 477,739,000원

공사개요 : 관내 자동차전용도로 일상유지보수 1식

도 급 사 : 엠투케이 건설(주)  대표 이명규

Ⅱ		변 경 내 역

공사비 변경내역                                         단위:원

구 분		당 초	변 경	증·감		비 고
총 공 사 비		477,739,000	570,000,000	증)	92,261,000
도급비	공급가액	434,308,182	518,181,819	증)	83,873,637
	부가가치세	43,430,818	51,818,181	증)	8,387,363
	합 계	477,739,000	570,000,000	증)	92,261,000

주요 공종별 공사비 증·감내역

공 종	공사비(원)		증·감		비고
	당 초	변 경
철거공	1,533,092	1,533,092	-	-
교면보수공	9,904,016	16,706,990	증)	6,802,974
방수공	304,790	137,777	감)	167,013
신축이음보수공	195,960,441	177,966,974	감)	17,993,467
상판보수공	270,514	270,514	-	-
콘크리트보수공	28,531,795	31,181,125	증)	2,649,330
수중보수공	1,520,354	584,534	감)	935,820
강재보수공	17,466,720	54,218,654	증)	36,751,934
도장보수공	571,596	13,371,685	증)	12,800,089
난간및차량방호책보수공	1,041,416	781,332	감)	260,084
가시설공	18,480,406	11,139,958	감)	7,340,448
교통 및 안전시설	32,694,015	35,068,714	증)	2,374,699
청소	23,666,619	45,914,566	증)	22,247,947

주요 물량 증·감내역

공 종	물 량			증·감		비고
	단위	당 초	변 경
아스팔트 균열보수	m	120	1,000	증)	880
신축이음장치보수(WD400)	m	1.0	1.0	-	-
신축이음장치보수(뉴웨이브핑거)	m	128.4	128.4	-	-
방호벽 차수조인트	m	20	15.4	감)	4.6
콘크리트 열화 단면제거	㎡	44.16	147.43	증)	103.27
콘크리트 단면보수(t=20mm)	㎡	116.8	131.1	증)	14.3
강관 배관 설치(STS, D150)	m	1.0	60.0	증)	59.0
교량받침 청소	개소	1.0	309.0	증)	308.0
신축이음장치 유간청소	m	744	1,488	증)	744

변경사유 : 집행잔액 활용계획에 따른 계약물량 증·감으로 인한 설계변경

Ⅲ		조 치 의 견

집행잔액 활용계획에 따라 공사물량 증·감이 발생된 사항으로 설계변경

시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.