문서번호	도시철도토목부-10847
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		홍숭희	10/06 이은상
협조
	주무관		윤원섭

지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

전면책임감리용역 설계변경 검토보고(총괄4회, 5차1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

서울 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

전면책임감리용역 설계변경 검토보고(총괄4회, 5차1회)

공사장 안전사고 재발방지 개선대책을 위한 안전전문 감리원 투입기간 변경 및 지중관리 전담감리원 증원에 따라 919공구 전면책임감리용역 설계변경을 검토 보고드림.

- 관련문서 : 전면책임감리용역 변경 계약요청(수성ENG, `14.10.02.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역

○ 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링 대표이사 박미례

○ 계약 및 집행현황 :                                  (단위 : 천원)

구 분	총 괄	기 집 행 (준 공)	5차 (금회)	잔여금액
		1차 ~ 4차
계약금액	5,912,815	1,992,000	727,000	3,193,815
용역기간	`09.11.18. ~ `16.02.18	`09.11.18. ~ `14.02.24	`14.02.25. ~ `15.01.31	-
투입인월	532.988	169.913	66.161	-

□ 추진경위 및 근거

○ ‘13.10.17 : 공사장안전사고 재발방지개선대책(행정2부시장 방침 제316호)

- 주요 공종 특성에 맞는 전문기술사 등 감리원 적정 증원 배치

○ ‘14.01.14 : 「2014년 전문감리원 추가배치 집행계획 확정 통보」(시설국 토목부)

○ ‘14.07.30 : 「 전문감리원 투입 변경계획 보고」(시설국 토목부)

- 안전감리원 투입기간 연장(919공구 17백만원)

○ ‘14.09.26 : 「도시철도공사장 지중관리 전담감리원 배치계획」(도시철도토목부)

- 계측전문단(2인) `14.9월까지 운영, 지중관리 전담감리원 `14.10.1부터 배치

□ 설계변경 및 전담감리원 추진사항

○ 설계변경사유

1) 전문감리원(안전분야) 투입 변경계획(`14.07.30)에 따른 계약금액 및 투입기간(총괄, 5차) 변경 조정

- 보조감리원(안전분야) 1인 투입기간 연장(증17백만원)

구분	투입기간	비고
당초	`14.03.03~`14.12.04
변경	`14.03.03~`15.01.31	58일 연장

- 총괄감리 인.월 변경(당초 532.988 → 변경 534.633, 증1.645)

- 5차감리 인.월 변경(당초 66.161 → 변경 67.805, 증1.644)

※ 안전분야 감리원 투입기준 : 감리사보 수준

(안전분야 기사 또는 산업기사+2년이상 경력자)

○ 전담감리원(계측 · 지중관리) 배치

1) 도시철도공사장 지중관리 전담감리원 배치계획(`14.9.26)에 의거 기 투입(`14.8.11)된 계측전담감리원(김상규, 유승필)은 `14.9.30까지 운영하고, 지중관리 전담감리원은 `14.10.1.부터 투입배치하여 현장관리코자 함.

구분	성 명	투 입 기 간	비 고
계측 전담감리원	김상규	‘14.08.11~’14.09.30
	유승필
지중관리 전담감리원	박지훈	‘14.10.01~	포장완료시까지

2) 이에 소요되는 예산은 `15년에 편성(250백만원)되므로 `15년 차수발주 시 반영

※ 예산과목 : 도시기반시설관리, 공사장 안전관리 대책추진, 감리비(401-02)

□ 용역계약 변경(안)                              (단위 : 천원)

구분	계약금액			용역기간			비고
	당 초	변 경	증,감	당 초	변 경	증감
총괄(4회)	5,912,815	5,929,815	17,000(증)	`09.11.18 ～`16.02.28	`09.11.18. ～`16.02.28	변경없음
5차(1회)	727,000	744,000	17,000(증)	`14.02.25 ～`15.01.31	`14.02.25. ～`15.01.31	변경없음

○ 예산과목

- 특별회계 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설산업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 감리비(5,827,815천원)

- 일반회계 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리(일반회계), 공사장 안전관리대책추진, 감리비(102,000천원)

□ 검토의견

○ “공사장 안전사고 재발방지 개선대책(행정2부시장 방침)”에 의거 『지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 책임감리용역』에 투입된 안전 전문감리원이 `14.12.4에 만료됨에 따라 현장의 효율적인 안전관리를 위해 투입기간 조정이 필요하며 투입기간 조정에 따른 감리용역 금액 및 기간 변경(총괄 및 5차)은 적합하다고 사료되며,

○ 전담감리원(계측 및 지중관리)은 「도시철도공사장 지중관리 전담감리원 배치계획」(도시철도사업부-6039,`14.9.26)에 의거 상기와 같이 투입 배치하여 효율적인 감리 업무 수행을 보다 철저히 할 수 있도록 함이 바람직하다고 판단됨.

□ 조치계획

○ 상기 “용역계약 변경(안)”과 같이 계약부서(재무과)에 계약변경 의뢰하고, 책임감리용역을 효율적으로 집행하고자 함.

첨부 1. 감리단 공문 1부.

2. 책임감리용역 변경내역서(총괄4회, 5차1회) 각 1부.   끝.