문서번호	임대주택과-11311
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		장기전세팀장	임대주택과장
장병혁		김동구	10/07 양용택
협조

2014년도 영등포 쪽방 촌 리모델링 공사완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

주 택 정 책 실

(임대주택과)

2014년도 영등포 쪽방 촌 리모델링 공사완료 보고

2014년도 영등포“쪽방 촌”리모델링(수선) 공사가 완료되어 보고 드림

□ 사업개요

○ 소 재 지 : 영등포구 영등포동 426-90번지 외13개 필지

- 14개동 (건물번호 : 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 44-1, 45, 49-1, 50, 51, 55)

○ 쪽 방 수 : 90호 쪽방

계	제1단계	제2단계	제3단계	비 고
90호 쪽방	37호 쪽방	24호 쪽방	29호 쪽방	12년 : 95호 쪽방 13년 : 130호 쪽방

○ 소요예산 : 925백만원

- 당초 100호 쪽방을 계획하였으나 건물주 동의 철회로 사업대상이 축소되어 소요예산이 감소될 것으로 예상됨

□ 그간 추진현황

○ 14.04.23  희망 협약체결 (서울시, 영등포구, 광야교회, 건물주)

○ 14.05.14  공사 착수

○ 14.06.25  제1단계 공사 완료

○ 14.08.06  제2단계 공사 완료

○ 14.10.01  제3단계 공사 완료

□ 향후 추진계획

○ 14.12월   사업비 정산 및 사업완료 보고

○ 15. 1월   2015년도 리모델링(수선)사업 추진계획 보고

붙임 : SH공사 공문 1부. 끝.