투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	흙막이 가시설 사장에 따른 계약단가 검토 의견 통보

1. 공사감독1처-7072호(2014. 8 .6)와 관련입니다.

2. 우리본부 시설공사인 「염창2 빗물펌프장 증설공사」의 흙막이 가시설 사장 실정보고건에 대해 사장에 대한 필요성은 기 승인처리하였고(방재시설부-7672호, 2014. 8.14) 단, 사장에 따른 재료비와 사용료에 대해 이견이 있어 이 부분을 우리본부 설계변경자문위원회(소위원회)에 상정하여 그 결과에 따라 조치하고자 하였으나 자문결과 일반적인 의견만 있어 다시 안전행정부에 질의를 한 결과 발주처 요구에 의한 흙막이 가시설 사장이라면 가시설 사용기간에 대한 사용료와 설계변경 당시의 가시설의 금액을 합한 금액으로 계약금액을 조정하는 것이 타당하다는 의견이 있어 우리본부는 이를 반영하고자 하며 단 재료비는 설계가×낙찰율을 적용하는 것으로 시공사와 협의 완료하였으므로 설계변경시 반영하시기 바랍니다.

붙임 : 질의답변서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	10/07 임춘근
협조자
시행	방재시설부-9905	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개