다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	주간업무보고(10주차) - 세외수입 인프라개선 사업

1. 세외수입종합징수시스템 인프라 개선 사업과 관련입니다.

※ 데이터센터 “2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강 사업”과 통합 추진

2. 세외수입종합징수시스템 인프라 개선 분야의 10주차 사업 추진현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상기간 : ’14. 9. 27 ~ 10. 3  【총27주차 사업중 10주차】

- 주간보고회 : ’14. 10. 6(월) 14:00 데이터센터

나. 추진실적

업무분야	주요 추진 사항	진척률	담당 부서
전 체		39.1% (목표:39.9%)
사업관리	• 성능 최적화 분야(WAS) 튜닝 인력 투입 : 10. 1(특급 4M)	9.5%	데이터 센터
HW, SW 구축	• 세외수입 DB서버 - Oracle 설치 및 RAC 구성 - 파일공유시스템(GPFS) 구성	43.2%	데이터 센터
AP서비스 이관	•AP 보완대상 분석 및 설계 : 대용량 테이블 3개 •단위테스트 시나리오 및 케이스 작성 •서비스(AP) 이관 및 마이그레이션 테스트 시행 환경 구성 - 이슈 트래킹 게시판 구축 : 단위테스트 진행 사항 관리 - 통합테스트 게시판 구축 : 통합테스트 진행 및 오픈후 현업부서 요청에 대한 소통 창구 •EJB 및 Webservice의 Jeus Upgrade(5.0 ⇒6.0)에 따른 에러 해결 - Tmax 기술지원으로 하위 호환성 처리를 위한 파라메터 추가 및 설정파일 항목 변경(또는 제거) •상용 SW 설치를 위한 일정 협의	30.0%	재정 사업단

업무분야	주요 추진 사항	진척률	담당 부서
연계서비스 테스트(이관)	• 연계시스템 서면조사 완료 • 연계시스템 조사(2차) 진행중 : 기술협의 및 기본자료 조사 ※ 연계시스템 기술협의서 작성중 • IP변경에 따른 커스터마이징 대상 범위 분석 - 소스내 IP삽입 정보 리스트 작성 및 3차 자체 검토중 • 연계프로그램 이중화 적용 협의 - To-Be 시스템 기준 AP 및 D서버 적용 대상 협의 (온라인,배치,데몬 작업에 대한 서버 분배) - DB Link적용 방안은 추후 협의 • 시도/새올행정 연계를 위한 기술 협의 : 10. 1 - 한국지역정보개발원과 업무 협의 : 테스트 일정 확인 및 기술 협의서 작성 요청 ※ EWC를 활용한 연계 구성도(세외수입-안행부 엔테라 솔루션- 자치구 EWC 솔루션) 분석 및 제조사와 기술 협의 실시	52.3%	재정 사업단
시스템성능 최적화 DB이관 및 마이그레이션	•성능테스트 분석단계 결과 보고 : 9.30 - As-Is 분석을 통한 성능테스트 대상 선정 및 목표 보고 •SQL Tunning 세미나 실시 •AP 이관 테스트(1차)를 위한 데이터 이관 준비	49.3%	재정 사업단

붙 임 : 1. 주간업무보고서(사업10주차) 1부.  끝.

주무관	조수정		세외수입팀장	양주춘		재정사업단장	10/07 백일헌
협조자
시행	세무과-22136	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3441	/전송	02-2133-1034	/	jokkokki@seoul.go.kr	/	대시민공개