함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(여과지 벽면정비공사)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『구의아리수정수센터 여과지 벽면정비공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공사개요

○ 공사명 : 구의아리수정수센터 여과지 벽면정비공사

○ 도급자 : (주)영진미방 대표 배재덕

○ 도급비 : 229,527,270원

○ 공사기간 : 2014.4.16. ~ 2014.10.12

나. 설계변경

○ 설계변경 금액

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증·감액(원)
도 급 비	229,527,270	211,740,000	감 17,787,270

○ 설계변경사유

- 공종별 계약물량 증․감 및 보험료 정산에 따른 변경

다. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙 임 : 1. 설계변경 심의 소위원회 개최결과 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부. 끝.

★주무관	김수영		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	10/07 오세영
협조자	주무관	신상용
시행	정수시설과-2370	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571(구의동)	/
전화	02-3146-5479	/전송		/	goso66@seoul.go.kr	/	대시민공개