함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 변경계약 의뢰

우리사업소에서 시행 중인 「목동배수지외 13개소 정밀안전진단 용역」의 준공기한에 대하여 변경시행하고 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 목동배수지외 13개소 정밀안전진단 용역

나. 계 약 자 : (재)한국건설품질연구원 김인식외 1개사

다. 계약금액 : 171,900,000원 (변경없음)

라. 당초 준공기한 : 2014. 5. 16 ~ 2014.  10. 12

마. 변경 준공기한 : 2014. 5. 16 ~ 2014. 12. 30

바. 귀책소재 : 강서수도사업소

사. 지체상금 : 미부과

아. 연기사유 : 배수지 항청소 기간 중 내부검사를 시행키 위한

공사기한 연장

붙  임 : 준공기한 연기방침 및 관련공문 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	서장원		주무관	손종백		시설관리과장	전결 10/07 이자원
협조자
시행	시설관리과-20894	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3146-4011	/전송	(02)3146-4039	/		/	대시민공개