투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(서남권 돔야구장 보행자 전용도로 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 『서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사』와 관련하여 관급자재(터널용 등기구 외 11종) 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기요청 내용

품 명	계약자	납품요구번호	계약금액 (원)	납품기한		비고
				당초	변경
도로조명설비	㈜한영전기	121423304900	77,431,050	‘14.10.25	‘15.02.28
가로등주 및 부속자재	에이컴조명(주)	121423311400	55,282,150	‘14.10.25	‘15.02.28
도로조명설비	㈜이텍	121423305200	11,056,430	‘14.10.25	‘15.02.28
거주로 조명설비	㈜썬레이	121423305100	62,496,970	‘14.10.25	‘15.02.28
메탈할라이드램프 외 5종	㈜강산조명	121423305000	47,335,990	‘14.10.25	‘15.02.28
분전반	㈜두리계전	121423306700	9,840,220	‘14.10.25	‘15.02.28

나. 연기사유 : 선행 공종 지연으로 관급자재 설치시기 미도래

다. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 납품기한 연기 방침서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	변인수		환경설비과장	이달영		설비부장	10/07 박기형
협조자
시행	설비부-10955	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	bon0818@seoul.go.kr	/	대시민공개