문서번호	총무과-26939
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이승준		최석기	10/07 이혜경
협조
	주무관		박교관

『2014년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

행  정  국

(총 무 과)

2014년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 검토보고

2014년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 공사시행중 공사물량의 증감과 신규비목 물량이 발생하여 설계변경을 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명  :  2014년도 시청사 건축시설물 유지보수공사(연간단가계약)

○ 공사기간  :  2014. 02. 28 ~ 2015. 02. 15

○ 계약금액  :  금263,897천원

○ 계약업체  :  엘비건설(주) 한세덕

○ 계약내용  :  건축시설물 유지보수공사 1식

□ 설계변경 검토내용

○ 대상 : 설계변경으로 인한 계약 내용변경(물량증감, 신규비목 등)

○ 법규 : 행정안전부 예규 제404호(‘12.3.22)

- 지방자치단체 공사계약일반조건 제7절 : 계약금액의 조정

․ 물량증감 : 증감된 공사량의 단가는 계약단가 적용

․ 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에

낙찰률을 곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

□ 변경내용

○ 변경금액 : 증 48,237천원

구 분	금 액 (천원)			비고
	계 약	변 경	증 감 액
총 공 사 비	263,897	312,035	증 48,138

○ 세부 공사내용 : 총 7건

연번	공 사 내 용	공사금액(천원)
1	서소문청사2동 계단난간대 도장공사등	33,381
2	송월동 청사 절개지 보수공사	13,188
3	남산별관 옥상 난간대 설치 등 시설개선 공사	16,632
4	임차청사(코오롱빌딩) 내부 칸막이 공사 등	186,506
5	시청 광장바닥 석재보수 공사	17,613
6	임시청사 4층 휴게실 설치공사	37,114
7	서소문청사 1동 내부 칸막이 공사 등	7,601
계		312,035

○ 검토결과

- 물량증감 : 계약단가 적용

- 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액 적용

- 국민건강 및 연금보험 : 공사준공 전 정산처리

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 당초 계약금액 내에서 설계변경을 시행하고,

○ 변경 계약 후 2차 기성정산을 시행하여 건축시설물 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함.

따로붙임  1. 합의서 1부

2. 변경설계서 1부. 끝.