투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청 (송정,사근빗물펌프장 증설공사 )

1. 우리부에서 시행중인 『송정,사근 빗물펌프장 증설공사(전체, 2차, 3차)』의 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 송정,사근 빗물펌프장 증설공사 (전체, 2차, 3차)

구 분	도 급 비	당 초	변 경	비 고
총 차	7,476,714,300원	'13. 3. 28∼ ‘14. 10. 31	'13. 3. 28∼ ‘14. 12. 30	60일 연기
2 차	4,887,766,800원	'13. 3. 28∼ ‘14. 10. 31	'13. 3. 28∼ ‘14. 12. 30
3 차	744,647,500원	'14. 6. 13∼ ‘14. 10. 31	'14. 6. 13∼ ‘14. 12. 30

※  도급비 변경없음.

나. 도 급 자 : 경동산업(주)외 1개사

다. 준공기한 연기 (전체, 2차, 3차)

- 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금부과여부 : 미 부과

- 연기사유 : ‘14수방기간(’14.5.15～10.15) 이후 구조물(가동보,2개소)설치됨에 따른 절대공기 부족 등

라. 예산과목 : 하천관리과, 치수및하천관리, 수방대책사업, 송정,사근빗물펌프장시설 용량증대

따로붙임  1) 준공기한 연기검토 보고서. 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부

3) 합의각서 1부 (별도송부). 끝

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임병길		방재시설과장	서관석		방재시설부장	10/07 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-9822	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15	/
전화	3708-8762	/전송	3708-8756	/	bglim@seoul.go.kr	/	대시민공개