문서번호	누수방지과-6186
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
이태형	강신재	이규상	10/07 정득모
협 조

IT를 활용한 상시 누수진단시스템 도입 추진계획 보고

2014.10

상수도사업본부

(시설안전부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

IT를 활용한 상시 누수진단시스템 도입 추진계획 보고

스마트폰이나 사무실(PC)에서 누수징후를 탐지할 수 있는 상시 누수진단시스템 도입 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진 근거

″상시 누수진단시스템 시범사업 추진계획 보고 ″(본부장결재    누수방지과-1517 ′14.05.01.)

❍ 새로운 탐지방법 도입 ⇒ 상시 누수진단시스템 적용

❍ 규 모 : 음수집센서(로거) 및 PDA 등 시스템 구축

Ⅱ		추진 경위

당초 추진계획

❍ 상시 누수진단시스템 기종선정 시연회 개최(‘14. 04.~06.)

- 중부, 강서수도사업소 취약 소블럭에 시범설치 효과 분석

❍ 상시 누수진단시스템 구축(‘14.07. 기종 선정)

- 시스템 선정대상 : 국내 사용 및 판매기종 2종

▸ 지능형 누수감지시스템(i-LMS)

누수음 수집센서 부착	음압센서와 무선통신을 이용 원격 실시간 누수감시

▸ 상시 누수진단시스템(LANK-I)

로거 및 변환기		밸브상단 로거부착(상시)	차량순찰(누수징후 수집)

❍ 시스템 구축 시범사업 추진(‘14.09.~’15.12.)

- 향후계획 : 실효성 검증 후 ‘16년부터 단계적으로 확대

추진 사항

❍ 시범사업 설명회 개최(‘14.05.18.)

- 참석자 : 25명(본부, 사업소 탐지업무담당자, 2개 업체관계자)

❍ 효과 분석을 위한 시연회 개최(‘14.05.19.~06.07.)

- 중부, 강서수도사업소 취약 소블록 각 1개

❍ 내부검토 회의 개최(‘14.07.15.)

- 참석위원 : 5명(누수방지과장, 중부, 북부, 강서, 강남수도사업소 급수운영과장)

❍ 상수도기술심의위원회 개최(‘14.08.13.)

- 참석위원 : 7명(부본부장, 외부위원 6명 - 서울시건설기술 심의위원)

- 심의결과

․ 제품에 대한 충분한 검증을 위해 ‘14년 예산 범위에서 2개 제품을 1년간 동일하게 임대하여 사용하고 효과에 따라 추가 임대 및 구매여부 검토

․ 시범설치는 2개 회사 제품을 중부, 강서수도사업소 취약지역(블록)에 각각 설치하여 모니터링

․ 예산을 2개사업소에 배정하고 사업소에서 임대 계약체결

❍ 시범사업 시행 사업소 선정(‘14.08.25.)

- 선정 결과

․ 중  부 : 지능형 누수감지시스템(i-LMS) ⇒ ㈜한국빅택

․ 강  서 : 상시 누수진단시스템(LANK-I) ⇒ ㈜서용엔지니어링

Ⅲ		문제점 및 대책

문 제 점

❍ 상시누수진단시스템 장비를 구매하기 위하여 ‘14년에 탐지장비 구매예산을 편성하였으나 상수도기술심의위원회에서 임대하는 것이 구매하는 것보다 유리한 것으로 결정 되었음.

-  ‘14년에는 탐지장비 구매 예산을 편성하여 임대예산 사용 불가

-  ‘14년 상시진단시스템 장비 구매 예산을 “이용” 하여야 사용 가능하며, 예산 “이용” 은 시의회 승인 사항임.

⇒ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구 비품, 누수탐지장비구입 (자산취득비)

※ 장비임대예산(상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운용비(사무관리비)

❍ 시스템 제작 및 임대계약 비용 산정 등 기간 소요 : 약 1.5개월

- 서울시(계약심사과) 심의 기간

처리대책

❍ 상시누수진단시스템 시범사업은 ‘15년 임대 예산을 신규로 편성하여 ‘15년 1월부터 시행함이 타당할 것으로 사료됨.

Ⅳ		향후 추진계획

‘15년 상시누수진단시스템 임대사업 예산 확보

❍ 상시누수진단시스템(로거 500개) 1년 임대 비용 : 약 3억원

임대계약서 검토 및 본청 계약심사과 심의 요청

❍ 임대비용 산출 등 임대계약서 본청 계약심사과 심의

수도사업소에서 임대 계약체결토록 지시

❍ 중부, 강서수도사업소에 임대 계약체결 지시 : ‘15. 1월부터

시범사업 추진계획 계약업체 통보

❍ ㈜서용엔지니어링, ㈜한국 빅택. 끝.