문서번호	시설보수과-7632
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
김종성		신동헌	10/07 김만수
협조
	주무관		김지환

불광천복개 외 2개소 보수공사

실정보고에 따른 검토보고

2014. 10

서부도로사업소

(시설보수과)

불광천복개 외 2개소 보수공사

실정보고에 따른 검토보고

우리 사업소에서 시행중인 불광천복개 외 2개소 보수공사와 관련하여 감독부서인 시설관리공단으로부터 실정보고서가 제출되어 이에 따른 검토 보고임

공사개요

공 사 명 : 불광천복개 외 2개소 보수공사

공사기간 : '14. 5. 8 ~ '14. 12. 3.

총사업비 : 1,659백만원(도급비 935, 관급비 591, 이설비 133)

공사내용 : 아스콘포장 511a, 신축이음설치 92m, 방수 5,166㎡

도 급 자 : 신한엔비텍(주) 대표 신병철

실정보고사항

근  거 : 시설관리공단 공사감독2처-15622('14.9.22)

실정보고사항 및 검토의견

연번	실정보고사항	검토의견
1	○ 녹번천복개 - 검토내용 · 그루빙 포장물량 구간 추가에 따른 아스콘포장 및 관급 자재비 증가 (L=277m) · 공사구간내 파손 신축이음 재설치 필요 (L=17.3m)	○ 시설보수과-7176(2014.9.19.)호로 통보된 서울시 감사 지적사항에 따른 변경 결정된 사항으로 실정보고와 같이 시행 (그루빙 포장구간은 아스콘포장에 적합한 미끄럼 방지 포장으로 시행, A=1,440㎡ )

연번	실정보고사항	검토의견
2	○ 불광천복개 - 검토내용 · 공사구간 연장 상이 L=492m→366m(감126m) · 자전거전용도로 누락 B=1.8m, L=366m · 탄성조인트 연장 상이 L=92.2m→9.9m(감82.3m) · 차선규제봉 설치 : 10개소 (설계 미반영) ․ 도로표지병 설치 누락 : 66개 · 신축이음 후타재 불량 (4개소, L=11m)	○ 시설보수과-7176(2014.9.19.)호로 통보된 서울시 감사 지적사항에 따른 변경결정된 사항으로 실정보고와 같이 자전거도로 포함 L=366m로 시행 ○ 구산역~연신내간 파손 신축이음 설치 (L=65m) ○ 운전자의 안전사고 예방차원에서 실정보고와 같이 시행
3	○ 욱천복개 - 공사구간내 탄성조인트 재설치 필요(L=123.7m) - 차선규제봉 설치누락 : 89개 - 도로표지병 설치누락 : 311개	○ 미반영 ○ 운전자의 안전사고 예방차원에서 실정보고와 같이 시행

설계변경 예정금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		1,659,537,000	1,779,800,000	증) 120,263,000
도급비	공급가액	850,124,546	858,545,455	증) 8,420,909
	부 가 세	85,012,454	85,854,545	증) 842,091
	계	935,137,000	944,400,000	증) 9,263,000
관 급 비		591,100,000	696,000,000	증) 104,900,000
이 설 비		133,300,000	139,400,000	증) 6,100,000

조치계획

상기 실정보고와 같이 우선 원활한 현장관리를 위하여 시설관리공단에 승인․통보코자 하며 공사비 증가부분에 대해서는 낙찰차액을 사용하여 추후 설계변경시 반영코자 함

예산현황

(단위 : 원)

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	비고
계	1,069,750,000	935,137,000	134,613,000

※ 낙찰차액 134백만원

붙 임 : 시설관리공단 실정보고서 1부.