투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역 변경 계약의뢰(총괄4회, 5차1회)

우리본부에서 시행중인 『서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역』의 안전분야 감리 투입기간 연장에 따라 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 전면책임감리용역

나. 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링 대표 박미례

다. 용역개요 : 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 전면책임감리

라. 당초 계약현황                                 (단원 : 천원)

구 분	총 괄	1~4차(준공)	5차(금차)	비고
용역기간	`09.11.18~`16.2.28	`09.11.18~`14.2.24	`14.2.25~`15.1.31
계약금액	5,912,815	1,992,000	727,000

마. 변경 계약내용(총괄4회, 5차1회)              (단위 : 천원)

구 분		총 괄			5차(금차)
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
계약금액		5,912,815	5,929,815	17,000(증)	727,000	744,000	17,000(증)
	특별회계	5,827,815	5,827,815	변경없음	642,000	642,000	변경없음
	일반회계	85,000	102,000	17,000(증)	85,000	102,000	17,000(증)
용역기간		`09.11.18 ~`16.02.28	`09.11.18 ~`16.02.28	변경없음	`14.2.25~`15.1.31	`14.2.25~`15.1.31	변경없음

바. 변경사유 : 안전전담 감리원 투입기간 연장

사. 예산과목

○ 일반회계 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리(일반회계), 공사장안전관리대책추진, 감리비 (102,000천원)

○ 특별회계 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 감리비 (5,827,815천원)

첨부  1. 전면책임감리용역 설계변경 검토보고서(총괄2회, 4차1회) 1부.

2. 변경설계서(총괄2회, 4차1회) 및 합의각서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조태현		궤도과장	홍숭희		도시철도토목부장	10/09 이은상
협조자	주무관	윤원섭		기획예산과장	최갑영		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-11000	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 서울시청 남산별관 4층	/
전화	02)772-7245	/전송	02)772-7306	/	cthhsh@seoul.go.kr	/	대시민공개