문서번호	총무과-27206
결재일자	2014.10.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	10/09 이혜경
협조

을지로청사 폐쇄에 따른

승강설비 유지관리 용역 기간 변경 보고

2014.  10.

행   정   국

(총 무 과)

을지로청사 폐쇄에 따른

승강설비 유지관리 용역 기간 변경 보고

을지로 청사 폐쇄에 따른 승강설비 2대 유지관리용역 기간을 아래와 같이 변경 하고자 합니다.

용역개요

❍ 용 역 명 : 2014년 을지로청사 외 2개소 승강기 유지보수 용역

❍ 용역기간 : ’14.3.1 ~ ’15.2.28

❍ 계약금액 : 7,400,000원

❍ 계 약 사 : ㈜에스엠엘리베이터 대표 이정수

❍ 계약내용 : 승강설비(2대) 휠체어리프트(2대) 유지관리

변경내용

❍ 을지로 별관 폐쇄에 따른 승강설비 2대 유지관리용역 기간 조정

- 당초 12개월 → 7개월로 변경 (’14.3.1~’14.9.30)

구 분	당초금액	변경금액	증․감	비 고
용역비(원)	7,400,000	5,704,600	감)1,659,400	5개월 감액

❍ 계약기간 : 변경없음

예산과목 : 행정지원체계강화, 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 일반운영비, 공공운영비.

조치의견

❍ 청사 폐쇄로 인한 과업범위를 조정한 것으로 승강설비 유지관리용역 준공 시 정산처리 하고자 함.

따로붙임 1. 합의각서 1부.

2. 변경내역 1부.  끝.