다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	119전진지휘소 건축공사 변경(설계내역 및 기간연장)계약 체결

1. 소방행정과-20182(2014.08.08.)호 “119전진지휘소 신축공사 실정보고서 검토결과 보고”와 관련입니다.

2. 소방행정과(경리팀) 추진 “119전진지휘소 건축공사”건에 대하여 다음과 같이 변경(설계내역 및 기간 연장)계약을 체결하여 공사가 원활히 이루어지도록 하고자 합니다.

가. 계약건명 : 119전진지휘소 신축공사

나. 계약방법 : 전자공개수의계약

다. 변경 계약현황

계약일시	계약업체	계약금액		납품기한
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
***** *****	******* ****** ************	*********	**********	**********	**********

라. 세부 변경내용

1) 계약금액 : ***************

. 흙막이 공사 추가, 기초구조 변경, 내역누락분 반영

2) 공사기간 변경 :*******

. 교황방문기간 공사 중단 : *************

. 휴일공사 곤란 및 장마철 강우중단 : ***

마. 계약보증금 및 수입인지 추가

1) 계약보증금 : ***********(증가금액의 15%)

2) 수입인지 : ********

. 계약금액 5,000만원~1억미만 = 70,000원

. 계약금액 1억이상 ~10억원 미만 = 150,000원

붙 임 : 1. 공사변경계약서(초안) 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

담당자	이회영		경리팀장	박찬호		소방행정과장	10/08 이성묵
협조자	담당자	김영재
시행	소방행정과-25300	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 6-7 서울소방재난본부 5층	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1342	/전송	02-3706-1349	/		/	부분공개(7)