함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(신내동 조압수조 외벽 보수 보강(도장)공사)

1. 우리 사업소에서 시행중인 “신내동 조압수조 외벽 보수 보강(도장)공사”에 대한 변경계약을 아래와 같이 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신내동 조압수조 외벽 보수 보강(도장)공사

나. 도 급 자 : 홍인내화(주)  대표 최기식

다. 계약기간 : 2014. 04. 17.~ 2015. 11. 20

라. 계약금액                                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	85,775,671	86,823,000	증1,047,329	신규공종 및 물량 증,감 발생

마. 설계변경 사유 : 신규공종 및 물량 증·감 사항 등 발생

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(22202-기타교체비)

따로붙임 : 1) 내부품의서 1부.

2) 설계변경 심의결과 보고서 1부.

3) 설계변경 심의위원 의견서 1부.

4) 설계변경 도서 1부

5) 합의서 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	김헌중		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	10/08 이시우
협조자
시행	시설관리과-24343	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 행당1동 131~152 142-1 동부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2817	/전송	02)3146-2839	/		/	부분공개(6)