투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	두모교 긴급점검용역 변경계약요청(준공기한연기)

1. 교량보수과-6385(2014.10.8.)호와 관련입니다

2. 우리사업소에서 시행중인“두모교 긴급점검용역”의 준공기한연기에 따른 변경계약을 아래와 같이 요청 드립니다.

○ 사 업 명 : 두모교 긴급점검용역

○ 사업기간 : 2013. 8.14 ~ 2014. 10.12

○ 시 행 자 : 한국시설안전공단

○ 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단,

시설비 및 부대비,시설비(205-401-01)

○ 변경내역

구분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2014.8.14.~2014.10.12	2014.8.14.~2014.12.19

○ 공기연장사유 :

- 자문회의결과 및 추진사항 점검회의결과에 따라 시험시공에 따른 공사기간 및 시공후 모니터링 및 결과분석 기간 등 과업내용 수행에 따른 절대공기 부족

붙임 : 관련서류 1부 끝.

	교량보수과장
주무관	백운경		교량보수과장	10/08 이수근
협조자
시행	교량보수과-6390	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개