투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	한국시설안전공단이사장
(경유)
제목	"두모교 긴급점검용역" 변경계약 시행 통보

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에서 수행중인 “두모교 긴급점검용역” 자문회의 및 추진사항 점검회의결과에 따른 A3~P20 시험시공 결과 모니터링 및 분석 등으로 아래와 같이 준공기한을 연기가 불가피하니 준공기한연기에 따른 변경계약을 시행하고, 용역 추진에 만전을 기하여  주시기 바랍니다.

ㅇ 사 업 명 : “두모교 긴급점검용역”

ㅇ 사업기간 : 2014. 8. 14 ∼ 2014. 10. 12

ㅇ 시 행 자 : 한국시설안전공단

ㅇ 변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2014. 8.14 ~ 2014. 10.12	2014. 8.14 ~ 2014. 12.19

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	백운경		교량보수과장	10/08 이수근
협조자
시행	교량보수과-6389	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개