투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행에 따른 재계약 의뢰(2014년 노후포장도로 정비공사-동부)

1. 도로보수과-5799호(2014.10.8.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 사업소에서 시행중인 「2014년 노후포장도로 정비공사-동부」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 재계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 노후포장도로 정비공사-동부

나. 도 급 자 : 홍용종합건설㈜ 대표 이춘택

다. 공사기간 : 2014. 05. 22. ~ 2014. 11. 30.

라. 설계변경 내역                                      (단위 : 원)

구 분	당초 금액(원)	변경 금액(원)	증 ․ 감(원)	비 고
총공사비	4,256,150,600	4,293,898,610	246,211,010	증
도 급 비	1,109,891,600	1,206,480,000	96,588,400	증
관 급 비	2,957,401,000	2,898,560,610	149,622,610	증
이 설 비	188,858,000	188,858,000	-

마. 변경사유 : 낙찰차액 사용에 따른 시공물량 증감사항 반영

바. 예산과목 : [도시개발] 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙  임 : 1. 설계변경(1회) 시행 1부.

2. 설계변경(1회) 사유서 1부.

3. 설계변경(1회) 검토 보고 1부.

4. 설계변경내역서(1회) 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이문희		주무관	박일연		도로보수과장	10/08 손수희
협조자
시행	도로보수과-5806	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지) 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0342	/전송	02-2040-0307	/	twodoor@seoul.go.kr	/	대시민공개