문서번호	정수과-2787
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조현태		임건혁	10/08 박기석
협조

정수지 개량공사 시뮬레이션 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10. 8

강북아리수정수센터

정수과

『강북정수센터 정수지 개량공사 관련』

시뮬레이션 결과 보고

강북정수장 고도정수시설의 정수지 개량공사와 관련하여 사전 시뮬레이션(생산량 50% 감축운영)을 실시한 결과 이상 없음을 보고 드림

☞ 관련근거 : 배수과-6443호(2014.10. 1.)

□ 시뮬레이션 계획

○ 일   시 : ’14. 10.7(화) 14:00 ~ 10.8(수) 08:00 <18시간>

○ 추진 내역

- 강북정수장 생산량 감축 : 2계열(81만톤/일) → 1계열 운영(50만톤/일)
- 부족 생산량 보완 : 수계전환 일부 및 배수지 저장 물량 사용

- 배수지 운영:

․관련배수지 만수위 확보 : 2014.10.7.(화) 13:00 까지

․관련배수지 ┏ 강북수계 : 공릉, 월계, 월곡, 북악, 불광, 백련(59.5만톤 확보)

┗ 구의수계 : 용마, 아차산

․시뮬레이션 및 연결공사 기간중 관련배수지 항청소 및 시설물보수, 안전진  단 등 작업 중단 : 기간 2014.10.2. ~10.22. 2차 연결공사 완료시까지

□ 시뮬레이션 추진 결과

○ 대   상 : 정수시설 생산라인 3.4계열 단수 운전

○ 시뮬레이션 및 연결공사시 자체 비상근무조 편성 운영

(김석진, 임태섭, 이종관)

○ 시뮬레이션 세부 진행 내역 : 별첨 1

□ 향후 계획

○ 시뮬레이션 추진 결과 이상 없음으로 정수지 개량공사 및 청소        병행 실시

- 1차 연결공사(1정수지) : 2014.10.14.(화) ~ 10.15(수)

- 2차 연결공사(2정수지) : 2014.10.21.(화) ~ 10.22(수)

○ 1,2차 연결공사 시행을 위해 관할 수도사업소 실제 배수지 운영  담당 부서 및 제어실 근무자 모두 작업내용 숙지 및 긴밀한 협조체계 구축

첨 부 : 1. 정수지 개랑공사 관련 시뮬레이션 세부 진행 내역 1 부.

2. 강북정수장 사전 시뮬레이션 및 연결공사 추진일정표 1 부.

3. 고도시설 연결공사 관련 비상연락망 1 부. 끝.