투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사(1차) 공사기간 연기의뢰

1. 우리 본부에서 추진중인 『돈화문 국악예술당건립 기계설비공사(1차)』

공사기간을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사(1차)
공사기간	총 차	2013.12.23~2015.06.22	2013.12.23~2015.06.22	변경없음
	1차	2013.12.23~2014.10.22	2013.12.23~2015.06.22	244일 연장
계약금액		금706,894,900원 (1차 100,000,000원)	금706,894,900원 (1차 100,000,000원)	변경없음
계 약 자		㈜일성이엔지 외 1개사 대 표 이영희

나. 변경사유 : 문화재 발굴, 민원발생 등으로 인한 선행 공종인 토목공사     지연에 따른 후속 공종인 기계설비공사 지연.

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박경철		시책사업과장	이흥복		설비부장	전결 10/08 박기형
협조자
시행	설비부-11087	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문31) 서소문별관2동2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	대시민공개