문서번호	시설과-7033
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		함석주	10/08 이용태
협조
	주무관		남상국

남산숲어린이집 녹색자금사업

현장점검 검토사항 보고

2014. 10.

중부공원녹지사업소

시설과

남산숲어린이집 녹색자금사업

현장점검 검토사항 보고

남산숲어린이집 녹색자금사업 관련 현장점검 중 발생한 실정사항을 검토하고 결과를 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남산숲어린이집 녹색자금사업

○ 위    치 : 중구 동호로 5길 193 남산숲어린이집

○ 공사기간 : 2014. 7. 30 ~ 10. 15

○ 도 급 액 : 금93,598,000원

○ 도 급 자 : 현도종합건설(주) 최태진

□ 검토내용

구 분	현황 및 문제점	검토의견	비 고
식재 공사	▶ 현장여건 및 생육을 고려하여 교목 규격 조정	▶ 교목 규격 조정(축소) - 전나무, 측백 : H3.0 → H2.0 대추,매화,산수유,이팝 : R15→R8 산딸,벚 : R12 → R8 때죽 : R15 → R10	감 11,923천원
	▶ 식재지가 경사면이므로 식생매트를 식재하여 유실방지	▶ 포트식재 물량을 식생매트로 변경 - 꽃잔디 → 꽃잔디(식생완성형매트) 맥문동 → 맥문동(식생완성형매트) 비비추 → 사초(식생완성형매트) 수크렁 → 수크렁(식생완성형매트) 수호초 → 수호초(식생완성형매트)	증 11,873천원
식재 공사	▶ 플랜터 내 식재물량이 없어 초화류 식재(어린이집 요청) ▶ 데크 중간 마사토구간 및 계단 사이공간 녹화	▶ 다년생 초화류 식재 - 구절초, 벌개미취, 사철채송화 등 추가 ▶ 잔디식재 및 보호매트 설치 - 잔디(중지) 및 보호매트 : 34㎡	증500천원 증1,700천원
시설물 공사	▶ 데크 상부의 플랜트주변에 어린이들 안전사고 예방 ▶ 원주목경계목 위치 조정	▶ 난간 설치 - 목재휀스(H700): 0 → 9.3m 목재휀스(H400): 0 → 3.6m ▶ 위치 변경 계단좌우측 → 사면유실부	증2,232천원
제경비	▶ 건강, 연금, 노인장기요양보험료 설계내역서 누락	▶ 보험료 산입	증1,329천원

□ 검토의견

○ 당초 설계된 내용에서 어린이집측 요청, 시공중 현 실정에 맞게 검토한 사항으로 향후 설계 변경에 반영하고, 추가 소요예산은 본 사업의 집행잔액을 활용하고자 함.

첨부 : 검토도면 1부.  끝.