문서번호	시설과-7026
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
남상국		10/08 함석주
협조

2014년 남산공원 시설 재정비사업 폐기물처리용역

설계변경사항 검토결과 보고

2014. 10.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

2014년 남산공원 시설 재정비사업 폐기물처리용역

설계변경사항 검토결과 보고

「2014년 남산공원 시설 재정비사업 폐기물처리용역」과 관련, 물량증가에 따른 설계변경사항을 아래와 같이 검토 보고드림.

□ 용역현황

❍ 사 업 명 : 2014년 남산공원 시설 재정비사업 폐기물처리용역

❍ 용역기간 : 2014. 8. 18 ~ 2014. 10. 16

❍ 도 급 액 : 금7,216,000원

❍ 도 급 자 : 서울환경 대표 양성희(운반), ㈜아이케이 대표 김상문외(처리)

□ 설계변경사항

❍ 관련근거 : 시설과-6920(‘14.10.2)호 및 시설과-7023(’14.10.8)호와 관련임

❍ 변경물량

구분	설계변경(안)	비고
폐기물운반	▶ 신남산배드민턴장 석축철거 지역 및 물품보관소 폐기물처리 물량 변경 -건설폐기물 : 252톤 → 290톤	시설과-6920(‘14.10.2.)호 및 시설과-7023(’14.10.8)호와 관련, 기 검토보고한 사항임
폐기물처리	▶ 신남산배드민턴장 석축철거 지역 및 물품보관소 폐기물처리 물량 변경( -폐콘크리트 : 220톤 → 170톤 -혼합폐기물(건설폐재류) : 32톤 → 120톤

❍ 변경금액

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급액	공급가액	6,560,000	9,180,000	증)2,620,000
	부가가치세	656,000	918,000	증) 262,000
	계	7,216,000	10,098,000	증)2,882,000

□ 보고자 의견

❍ 공사중 발생한 실정사항 및 현장여건 변화에 따른 물량변경 사항으로 폐기물 증가 및 폐기물 업체 계근량에 맞춰 설계변경 처리하고자 하며,

❍ 추가 소요예산은 『2014년 남산공원 시설 재정비사업』 집행잔액(이전비) 예산을 활용하고자 함.

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증 1부.  끝.