문서번호	기전과-9317
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
박신범		10/08 정윤식
협 조	주무관		백윤광
	주무관		박정민

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역) 제2차 작업지시』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

2014. 10.

북부도로사업소

(기전과)

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역) 제2차 작업지시』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역) 제2차 작업 추진중 책임감리사(영호이앤씨)로부터 현장실정에 따른 기술검토의견서가 접수되어 이를 검토하고 조치계획을 보고함

□ 관련근거

○ 2014. 09. 12. 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역) 제2차 작업지시

○ 2014. 10. 02. 북부2구역 2차 작업지시 실정보고서 제출(영호이앤씨)

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역)

○ 공사기간 : 2014. 04. 11 ~ 2015. 02. 28

○ 시공업체 : ㈜세진종합이엔씨 대표 이성임

○ 계약금액 : 금504,515천원

□ 제2차 작업지시 내용

○ 작업기간 : 2014. 09. 15 ~ 2014. 10. 14

○ 작업대상 : 노원구 일대 차량신호등 379조 철거 외 8건

○ 작업금액 : 금184,019천원

연번	교차로명	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
1	온곡초교	○ 당초 디자인지주로 설계되었으나 사업소 보유중인 차량지주 및 부착대를 관급자재로 활용함	○ 차량지주 및 부착대 사양변경 - 차량지주(Φ250mm × 8m,관급) 신설 : 1본 - 차량지주(Φ200mm × 8m,관급) 신설 : 4본 - 차량지주(Φ200mm × 8m,사급) 신설 : 1본 - 부착대(Φ80mm × 6m,관급) 신설 : 1본 - 부착대(Φ80mm × 6m,사급) 신설 : 1본 - 부착대(Φ80mm × 5m,사급) 신설 : 2본 - 부착대(Φ80mm × 3m,사급) 신설 : 1본
연번	교차로명	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
2	온곡초교	○ 신호지주 신설 및 철거, 제어기 좌대 신설 및 철거, 맨홀 신설 및 철거 등 굴착 공사 후 보도블록 가복구 필요	○ 보도블록 가복구 비용 추가 - 지주형 좌대기초 설치 블록 포장 : 1EA - 콘크리트 좌대기초 철거 블록 포장 : 1EA - 지주(Φ250mm) 기초설치 블록 포장 : 1EA - 지주(Φ200mm) 기초설치 블록 포장 : 5EA - 지주(Φ200mm) 기초철거 블록 포장 : 2EA - 지주(Φ150mm) 기초설치 블록 포장 : 2EA - 맨홀(600mm) 철거 블록 포장 : 2EA - 맨홀(800mm) 철거 블록 포장 : 1EA	감 8,046
3		○ 현장조사결과 제어기 맨홀의 규격이 설계와 다름	○ 제어기 맨홀의 물량 변경 - 맨홀(600mm,주철뚜껑포함) 철거 : 2EA - 맨홀(사각, 600mm) 고재 : 2EA
4	초당초교	○ 당초 디자인지주로 설계되었으나 사업소 보유중인 보행지주가 있어 관급자재로 활용함 ○ 기초앙카(Φ125mm) 신설 후 보도블록 가복구 필요	○ 보행지주 사용변경 - 보행지주(Φ125mm × 4m,관급) 신설 : 1본 ○ 보도블록 가복구 비용 추가 - 지주(Φ125mm) 기초설치 블록 포장 : 1EA	감 323
5	건강보험료 연금보험료 노인요양보험료	○ 보험료납부 증빙자료 미제출에 따른 감액	○ 보험료 정산	감 3,658
6	간접비	○ 직접재료비, 직접노무비, 기계경비 및 보험료 정산에 따른 간접비(일반관리비, 이윤 등) 차액 발생	○ 간접비 정산	감 3,582
합 계			감 15,609

□ 감리사 현장실정보고 내용 및 검토의견               (단위:천원)

□ 작업지시 변경금액

구분	변경 전	변경 후	증 ․ 감	비고
공급가액	167,290,000	153,100,000	14,190,000
부가가치세	16,729,000	15,310,000	1,419,000
합 계	184,019,000	168,410,000	15,609,000

□ 보고자 의견

○ 책임감리사(영호이앤씨)로부터 접수된 현장실정보고에 대해 검토한 결과 현장여건에 맞게 변경하여 위와 같이 시공토록 승인하고 작업을 추진토록 하고자 함

붙 임 :  제2차 감리사 현장실정보고  1부.  끝.