	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계공모 공고 의뢰(서울기록원 건립공사 설계용역)

1. 본부장 방침 건축부-6525(2014.5.28)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진하는『서울기록원 건립공사』설계용역과 관련하여 아래와 같이 설계공모공고를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 사업개요

가. 용역명 : 서울기록원 건립공사 설계용역	나. 대지위치 : 은평구 통일로 (녹번동 산11-6 일대)

다. 건립규모 : 지하2층/지상4층, 연면적 15,610㎡

라. 설 계 비 : 2,677백만원

마. 주 용 도 : 공공업무시설

○ 설계공모 개요

가. 관련근거

- 건설기술진흥법 시행령 제52조 제2항

- 지방자치단체를 당사자로 하는계약에 관한 법률 시행령 제42조의4

- 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2012-446호, ‘14.7.23)

나. 설계공모 방법 : 일반공개공모(국제입찰 공고대상)

다. 참가자의 자격 : 설계공모 지침서 참조

라. 공고방법 : 국가종합전자조달시스템(조달청 g2b) 등

※ 설계공모 심사위원 명단 포함

바. 설계공모 추진일정

- 설계공모공고 : 2014. 10. 8(수)

- 응모신청서등록 : 2014. 10. 13(월) ~ 10. 14(화)

- 현 장 설 명 : 2014. 10. 15(수) 14:00(사업부지 내)

- 작 품 접 수 : 2014. 12. 12(금) 17:00

- 작 품 심 사 : 2014. 12. 18(목)

사. 향후 추진일정

- 2014. 12월 : 설계용역 계약 및 설계용역 착수

- 2015. 08월 : 설계용역 준공(설계기간 240일)

- 2015. 11월 : 공사 착공

- 2017. 10월 : 공사 준공(착공일로부터 24개월)

따로붙임 : 1. 설계용역 시행계획 방침서 1부.

2. 설계공모 공고문(국문, 영문) 각1부.

3. 설계공모지침서 1부.

4. 과업내용서 1부.

5. 심사위원 명단 1부. 끝.

	건축부장
주무관	이형재		복지시설과장	조영수		건축부장	10/08 김우성
협조자
시행	건축부-12022	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2651	/전송	02-3708-2659	/	hjlee0815@seoul.go.kr	/	대시민공개