투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	단가계약물품 변경구매-관급자재(경계석)(자전거도로 업그레이드 공사)

1. 시설관리과-2758(2014. 10.7)호 관련입니다.

2.“한강공원 자전거도로 업그레이드 공사”에 소요되는 관급자재에 대하여 해당부서에서 변경요청이 있어 다음과 같이 계약을 변경하고자 합니다.

가. 건  명 : 관급자재(경계석)(자전거도로 업그레이드 공사)

나. 변경내역

납품요구번호	품명	규격	단위	당초		변 경		증 감
				수량	금액	수량	금액	수량	금액
12-14-1-32947 -00	자연석 경계석 (석재블록)	150×150 ×1000직선	개	1,000	12,050,000	1,840	22,172,000	840	10,122,000
		150×150 ×1000곡선	개	10	220,900	2	44,180	-8	-176,720
		200×250 ×1000직선	개	400	9,944,000	188	4,673,680	-212	-5,270,320
		200×250 ×1000곡선	개	10	398,900	0	0	-10	-398,900
		200×250/100 ×1000직선	개	10	236,600	0	0	-10	-236,600
		계			22,850,400		26,889,860		4,039,460

다. 변경사유 : 시공물량 변경에 따른 관급자재 변경구매

붙임  변경요청서 1부.  끝.

주무관	이규옥		총무과장	10/10 최대봉
협조자
시행	총무과-15328	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개