문서번호	물재생시설과-10707
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
김익동	최년수	윤창진		10/12 한유석
협 조

난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 추진계획

2021. 10

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 추진계획

서울시-고양시 상생발전을 위한 공동합의문 및 이행각서 체결에 따른 후속조치로 추진한 난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 기본계획 수립 결과 및 향후 추진계획을 보고드림

1		추진개요

□ 추진배경

○ 서울시-고양시 상생발전을 위한 공동합의문 체결 및 실무협의 등을 통해 분뇨처리시설 지하화(’25년) 추진 합의

○ 노후화된 분뇨처리시설의 악취발생 저감 및 지역 주민의 생활환경 개선을 위해 분뇨처리시설의 지하화 및 시설개선 필요

□ 그간의 추진사항

○ ’12. 5. 2. : 서울시-고양시 상생발전을 위한 공동합의문 체결

- 난지물재생센터의 현대화 등 환경개선 중장기 추진

○ ’11.11.~’12.12. : 난지물재생센터 환경개선사업 기본계획 수립용역

○ ’13. 2. 4. : 난지물재생센터 환경개선사업 추진계획(2부시장 방침 제37호)

- 중기계획 : 분뇨처리시설 지하화

○ ’17. 1.17. : 서울시-고양시 이행각서 체결

① 단기(’13.~’19.) : 악취저감 등 환경개선, ② 중기(’20.~’23.) : 분뇨처리시설 지하화

③ 장기(’24.~’30.) : 하수처리시설 복개공원화

○ ’19. 5.~12. : 서울시-고양시 공동협의체 운영(4회) 및 실무합의

- 분뇨처리시설 지하화(’23년→’25년) 및 복개공원화(’30년→’28년) 추진

○ ’20. 7.~’21. 7. : 난지 분뇨처리시설 지하화 기본계획 수립용역

○ ’21.10. 7. : 난지물재생센터 현대화사업 추진계획(2부시장 방침 제194호)

2		분뇨처리시설 지하화 기본계획 용역 결과

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 난지 분뇨처리시설 지하화·물재생센터 분뇨처리시설 증설 타당성조사 및 기본계획 수립

○ 용역기간 : ’20. 7. ~ ’21. 7.

○ 용 역 비 : 711백만원

□ 용역결과

○ 인근 주거지역 악취영향 최소화를 위한 사업부지 선정

기존시설

지하화시설

⇒

덕은지구

난점마을

○ 분뇨처리시설 배치 및 동선계획

***************

***

개 요	․시설물 최상층을 지상에 설치 후 상부공간에 녹지 및 조경시설 설치
설치도
특징	․수처리시설 복개공원화를 고려한 설치로 부지이용 및 연계성 확보 ․지상 구내도로를 이용하여 분뇨 차량 진입 용이
배치계획	․지하1층(반입장, 사무실, 전기실 등) ․지하2층(전처리실, 농축기실, 탈취기실 등) ․지하3층(분뇨저류조, 슬러지저류조 등)

E.L. 16.2m

E.L. 17m

분뇨처리시설

수처리시설(복개)

※ 자유로 E.L. 14.2m

E.L. 8.5m

E.L. 8.5m

E.L. 8.5m

E.L. -10m

E.L. -10m

○ 분뇨처리시설 공정 계획

○ 소요사업비

(단위 : 백만원)

구 분			금 액	비고
공사비	계		*******
	지하화 시설 구축	토목공사	******
		건축공사	*****	건축설비 포함
		기계공사	******
		조경공사	*****
		전기 및 계측제어공사	******
	기존시설철거		*****
설계비, 건설사업관리 및 시설부대비, 인허가비			******
총 사 업 비			*******

3		분뇨처리시설 지하화 사업계획

□ 사업개요

○ 사업내용 : 분뇨처리시설 이전 및 지하화 설치(기존시설 철거 포함)

○ 규    모 : 시설용량 4,500톤/일, 부지면적 29,856㎡(건축연면적 17,106㎡)

○ 사 업 비 : *******

○ 사업기간 : ’20. 7. ∼ ’25. 12.(설계 및 공사시행)

□ 기본설계 추진계획

○ 추진내용

- 기본계획 결과에 따른 기본설계 시행

- 성능보증 책임이 명확한 최적의 발주방식 선정

- 최적의 설계를 위한 사업관리(설계감리) 시행

○ 사업개요

【기본설계 용역】

- 용 역 명 : 난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 기본설계

- 용역기간 : 착수일로부터 10개월

- 소요예산 : 약 20억원

【기본설계 사업관리 용역】

- 용 역 명 : 난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 기본설계 사업관리

- 용역기간 : 착수일로부터 6개월

- 소요예산 : 약 2억원

□ 연차별 투자계획 및 투자재원

○ 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	~2021	2022	2023	2024	2025
분뇨처리시설 지하화	*****	*	**	***	***	***

○ 투자재원

- 전액 공기업 하수도사업특별회계 예산 투자

□ 향후 계획

○ ’21.10. : 기술용역 타당성심사 의뢰

○ ’21.11. : 사업 수행능력 평가기준 심의

○ ’21.12. : 일상감사, 기술용역 발주심의

○ ’22. 1. : 기본설계 용역 발주

○ ’22. 5. : 개발제한구역 관리계획 변경수립 용역 추진

○ ’22.12. : 대형공사 입찰방법 심의

○ ’23.1.~’25.12. : 실시설계 및 공사 시행.  끝.