문서번호	토목부-19676
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
김성권		김영수	10/10 노우성
협조

홍보물 및 안전시설 설치보고

(약수고가차도 철거 및 교통개선공사)

2014.10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

홍보물 및 안전시설 설치보고

(약수고가차도 철거 및 교통개선공사)

약수고가 철거에 대한 사전 홍보 및 철거기간동안 교통정체에 대한 우회로 홍보 등을 위한 홍보물 및 안전사고 예방을 위한 안전시설물 설치하였으므로 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 약수 제14-210호(2014.10.10.) : 공사홍보물 및 안전시설 변경 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 중구 신당동 374

○ 개    요 : 고가차도철거(폭 15.4m, 연장 420m), 환기구 이설 3개소

○ 공사기간 : 2013.12.23. ∼ 2014.10.31.

○ 도 급 비 : 5,828,420천원

○ 시 공 사 : 용성종합건설㈜ 외 2    ○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 1

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 현 황

- 약수고가차도 철거공사를 위한 교통규제심의에 대한 협의결과 교통체증 및 민원발생을 최소화하기 위하여 홍보물설치(안내표지판, 현수막, 배너 등)하여 교통정체에 해소에 대한 조치계획.

○ 홍보물 설치현황

구분	규격	단위	수량			비고
			당초	변경	증·감
우회도로안내	0.9×1.8	개	65	102	37
배 너	0.5×1.0	개	209	660	451
안 전 휀 스		m	2,474	0	∇2,474
가 림 막		m	0	216	216
방호벽휀스		m	0	540	540
P E 방호벽			226	270	44
시선유도봉		개	0	116	116

○ 검토결과

- 서울지방경찰청과 교통처리계획을 위한 규제심의(협의)시 경찰청으로부터 교통체증 해소를 위한 사전홍보 및 추가홍보 요청(교통관리과-19267 ‘14. 7.11.)

-  공사중 고가차도 차량 통제에 따라 예상되는 교통정체를 홍보하여 차량이 공사구간을 통하지 않고 우회로를 이용하여 운행할수 있도록 사전홍보 지시(업무연락SMH-14-30668 ‘14. 6.30.)

- 공사장 주변으로 이동하는 보행자 및 차량은 물론 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 안전시설 추가설치 필요

- 신규 비목은 2014. 7월 기준으로 산출하였으며 낙찰율 적용

○ 주요공사비 증감

(단위 : 천원)

구 분	규 격	단위	공 사 비			비 고
			당 초	변 경	증 • 감
순 공사비		식	75,902	165,961	90,059
부가가치세		식	31,098	64,739	33,641
도 급 액			107,000	230,700	123,700

○ 감리단 검토의견

- 공사를 위한 사전홍보물 설치와 함께 공사중 발생할수 있는 안전사고 예방을 위한 안전시설 추가 설치에 따른 실정보고건을 검토한바, 사전홍보물 및 안전시설물 추가설치 반영은 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조치계획

○ 공사중 발생하는 교통정체 해소 및 안전사고 에방을 위하여 홍보물 및 안전시설을 추가로 설치한 것은 타당한 것으로 판단되므로 설계변경 자문회의 결과에 따라 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙  임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.