문서번호	교량보수과-3118
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김근섭		김종대	10/10 정진오
협조	주무관		김형섭
	주무관		이기승

설계변경(제2회) 검토 보고

(자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사-2014)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  10

성동도로사업소

(교량보수과)

설계변경(제2회) 검토 보고

- 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사(2014)-

우리사업소에서 시행중인 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사(2014)  설계변경(제2회) 시행에 대한 검토 보고임

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사(성동)

○ 공사기간 : 2014. 4. 2 ~ 2015. 2. 28

○ 도급금액 : 652,727,300원

○ 공사개요 : 균열보수 103m, 신축이음보수 50m, 교면포장 47a 등

○ 도 급 자 : (주)케이알건설 대표 황태하

Ⅱ		설계변경 검토

○ 작업완료(제6,9,10,12차)사항 반영한 설계 변경

- 시설물별 주요 작업완료 사항

시설물명	작업완료 사항	비고
중랑상단IC	․ 연석부 단면복구 84㎡, 표면보수 234㎡	6차
중랑하단IC	․ 연석부 단면보수 27㎡,표면보수 298㎡ ․ 슬래브하면 표면보수 152㎡ ․ 강교 도장보수 20㎡
군자하단IC	․ 강교 도장보수 16㎡
뚝도2교	․ 아스팔트포장 균열보수 100m	9차
정릉천고가교	․ 조류출입 방지망 설치 54㎡ ․ 방음벽하부 단면복구 2㎡ ․ 방음판 고정 20경간
봉화교	․ 아스팔트포장면 보수 3.2㎡
	․ 교면방수 및 포장 3.06a ․ 슬래브열화부 보수 66㎡ ․ 배수구 설치 13개소	10차
아차산교	․ 교면방수 및 포장 13a	12차

※ 작업지시 완료 세부현황 : 별첨

○ 설계변경 내역

- 도급비 변경 현황                                   (단위:원)

구 분		금 액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총 공사비		747,777,300	843,000,000	증)95,222,700
도급액	공급가액	593,388,456	679,954,546
	부 가 세	59,338.844	67,995,454
	계	652,727,300	747,950,000	증)95,222,700
관급자재비		65,736,000	65,736,000	-
이전비		29,314,000	29,314,000	-	폐기물 등

- 작업완료 공종 및 수량 반영 등 따른 설계변경

- 낙찰차액 사용에 따른 도급비 증가

Ⅲ		조치계획

○ 작업지시에 대한 작업완료 시공물량 및 공종, 낙찰차액 사용계획 등을 반영한 변경 사항으로 설계변경 시행하고자 함

첨부  설계변경 내역서(수량집계표 등) 관련서류 1부.  끝