문서번호	정보시스템담당관-12157
결재일자	2014.10.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		행정포털팀장	정보시스템담당관
김윤수		김기항	10/13 김기병
협조
	주무관		이운심

통합메일 DB 서버 이관에 따른 서비스 중단 및 오픈 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

정보시스템담당관

통합메일 DB 서버 이관에 따른

서비스 중단 및 오픈 계획

통합메일 DBMS S/W를 버전 업그레이드하고 DB서버를 고성능의 신규서버로 교체 및 이중화 하기 위한 작업을 진행함에 따라 서비스 중단과 오픈 계획을 보고드림.

Ⅰ				추진배경

□ 추진근거

❍ 2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강 사업 세부 추진계획 (데이터센터 정보자원운영과-581, 2014.4.25.)

❍ 2014년 정보자원 통합인프라 구축 사업 통합메일DB 서버 이관계획 (데이터센터 정보자원운영과-2631, 2014.10.8.)

□ 추진배경

❍ 노후화된 장비(2009년도 도입, 1식) 교체를 통한 안정적인 운영환경 제공 필요

❍ 신규 유닉스 통합서버를 도입하여 통합메일 DB 서버 이중화 구성을 통해 장애 시에 대비하여 고가용성 제공

Ⅱ				DB 이관 개요

□ 추진현황

❍ 2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강 착수보고회(2014.8.18)

❍ 메일 DB 현황 분석 및 이관 방안 1차 협의(2014.8.25)

❍ 장비설치, 서버구성, DBMS설치(2014.9.4 ~ 9.30)

❍ 메일 DB 및 디스크 이관 관련 2차 협의(2014.9.23)

❍ 테스트 데이터(실서버 이틀 분) 이관 작업(2014.10.1 ~ 10.2)

□ 신규 DB와 개발 서버 연계 테스트

❍ 개발 서버 DB 연결 설정(2014.10.6)

❍ 테스트 일정 : 2014.10.7 ~ 10.23

❍ 테스트 방법 : 개발서버를 이용하여 전수 기능 테스트, DBMS(Oracle) 버전 업그레이드(9i→11g)에 따른 기능 오류 및 성능 저하 확인

Ⅲ				신규DB 오픈 계획

□ 신규 DB 오픈 일정 : 2014.10.26. 9시(예정)

□ 신규 DB로의 이관 작업을 위한 서비스 중단

❍ 일정 : 2014.10.24. 21:00 ~ 10.26. 09:00

❍ 공지 계획(2014.10.13.)

- 시업무공지/시구업무공지 게시판 공지

- 시 및 자치구 공문 발송

- 통합메일 메인화면 레이업 팝업 공지(2014.10.22.)

□ 신규 DB와 연결을 위한 작업

❍ DB 연결 설정 변경

- 통합메일 : WAS DB pool, 메일(발송) 서비스 config

- 릴레이, 아카이빙 :  서비스 config

- 행정포털 : 받은편지 포틀릿 관련 WAS DB pool, 전체 새편지 카운트 Shell용 config

❍ AP 수정 소스 반영

- DBMS 버전 업그레이드에 따른 쿼리 오류 및 성능 튜닝 사항 반영

□ 오픈 전 서비스 테스트 및 정합성 확인

❍ 테스트 및 확인 일정 : 2014.10.25. 19:00 ~ 21:00

❍ 서비스 포트(9001)가 아닌 별도 포트로 웹서버 기동하여 일반 사용자는 접속할 수 없도록하여 신규 입력이나 수정을 최소화 한 상태에서 확인

❍ 확인 결과 이상이 없을 경우 바로 오픈하여 서비스 중단 시간 최소화

붙임 1. 메일 DB 이관 계획서(데이터센터)