문서번호	공간정보담당관-10581
결재일자	2014.10.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보운영팀장	공간정보담당관
장인호		김연섭	10/13 조봉연
협조

「지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업」

주간 보고 (10월1~2주)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

공간정보담당관

(공간정보운영팀)

□지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업□

주간 보고 (10월1~2주)

-  -

사 업 명	지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업
사업기간	2014.5.9. ~ 2014.11.3.	사 업 자	㈜지노시스템 컨소시엄
사 업 비	96,120천원	사 업 PM	㈜지노시스템 ******
주요내용	○ 지반정보(시추공) 조회 기능 추가 검토 ○ 완료보고회 일정 협의 ○ 사용자 교육 계획 수립

진행단계	개발 단계		전체 진척율	78.8%
업무구분	실적(2014.09.25 ~ 2014.10.08)		계획(2014.10.09 ~ 2014.10.15)
시스템 개발	□ 연계부분 개발 - 싱크설정 및 스케줄러 조정 작업(계속) - 굴착연계 상세조회 기능 개발(계속) □ UI 기능개선 - 로그인 화면 이미지 완료 및 적용 □ 관리자 페이지 개선 - 지하시설물 통계기능 보완 작업 - 사용자 권한관리 보완 완료 □ 단위테스트 완료		□ 연계부분 개발 - 싱크설정 및 스케줄러 조정 작업(계속) - 굴착연계 상세조회 기능 개발(계속) □ 관리자 페이지 개선 - 지하시설물 통계기능 보완 작업 □ 지반관리시스템 연계방안 협의 - DB설계서 인수 및 업무협의
기타	□ 사업관리 - 사용자 매뉴얼 작성		□ 사업관리 - 운영자 매뉴얼 작성
미결업무 및 대책	내 용		대책 및 조치사항
협의 사항	□ 지반정보(시추공) 조회 기능 추가 검토 - 지반정보시스템 DB 접속 등 연계 방안 검토 - 지반정보시스템 상세조회 기능 가능 여부 확인 등 □ 기타사항 - 유관기관, 내부 사용자 로그인 혼동 방지를 위한 페이지 수정 요청 - 시스템 인수 테스트 및 완료보고회 일정 협의 - 사용자 교육 협조 요청 : 굴착복구업무 시 기본도 및 준공성과물 등록 등 - 준공 산출물 준비 철저 요청
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용