국회의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-16210
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		치수계획팀장	하천관리과장	물관리정책관	도시안전실장	결재
엄기숙		안준수	김용학	김학진	10/13 조성일
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호1432번, 이철우 의원, 안전행정위원회)

의원님께서 요구하신 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이철우 의원(안전행정위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 1432번

□ 요구내용

1. 최근 5년간 서울시가 수립한 수해대책 사업, 사업별 개요,

예산 및 결산액, 실적

2. 대심도배수터널 건설계획 및 추진현황, 관련 기초자치단체의 입장표명 또는 의견제출 현황

1. 최근 5년간 서울시가 수립한 수해대책 사업, 사업별 개요, 예산 및 결산액, 실적

○ 최근 5년간 서울시가 수립한 수해대책사업

-  2010, 2011년 집중호우 이후, 침수 취약지역(34개소)별로 중점관리 추진하고 있음.

․특별관리 : 신월지역 등 11개소

․중점관리 : 오류동역 주변 등 16개소

․기타관리 : 공릉초교 주변 등 7개소

- 주요 침수해소사업(소요예산 : 1조 4,873억원)

2014 하반기	2015	2016	2017	2018
2개소	5개소	6개소	7개소	7개소
∘선릉역 일대 ∘을지로입구역	∘성대시장 일대 ∘공항펌프장 일대 ∘신촌현대백화점 일대 ∘풍납1,2동 주민센터 ∘공릉초교 일대	∘한강로 일대 ∘신월지역(2개소) ∘대치역사거리 ∘신천지역 ∘잠원지역	∘광화문 일대 ∘강서구청사거리 ∘시흥사거리 일대 ∘내방역사거리 일대 ∘암사역 주변 ∘오류동역 주변 ∘용답동답십리 일대	∘강남역 일대 ∘도림천(3개소) ∘사당역 일대 ∘길동 일대 ∘망원유역 일대

․ ’13년 완료(5개소) : 구의·자양, 면목동, 미아삼거리, 장위동, 가산디지털단지역 주변

․ ’14년 상반기 완료(2개소) : 영림초교, 장안1동 주민센터

○ 34개 침수취약지역 추진개요, 예산 및 실적 : 붙임 참조

붙임

지 역	주요 개요		완료 연도	예 산 (천원)
	단 기(14년까지 완료)	중장기(15년 이후 완료)
총 계				19,653
광화문 일대	하수관거 개선(870m) 및 세종로 주차장 저류조, 유입시설 103개소 확충	하수관거 개선(1.12km), 빗물관리시설 확대설치(46개소) 등	‘17년	288
한강로 일대(신용산역 주변)	빗물유입시설 확충(한강로 횡단 140개소, 연속형 107m), 만초천 교량 재설치	유역분할 관거(1.3km) 및 펌프장 신설(1개소), 저류조(3개) 등	‘16년	543
구의․자양동일대	자양펌프장 증설 및 구의문주차장 저류조 설치 등		‘13년완료	840
신월지역(①신정사거리, ②화곡시장일대)	하수관거 개선 및 오금펌프장 증설	빗물저류배수시설(3.61km) 및 유입수로 (1.09km) 등	‘18년	3,144
동작․사당동 일대	저류조 설치(2개소) 및 도로물막이판 설치(4개소), 하수관거 개선(82m) 등	종합 방재시설 확충방안 논의중	‘18년	2,328
도림천 주변(①미림여고, ②신림동우편물 취급소, ③구로디지털단지역 주변)	저류조 설치 및 신림3교·충무교 재가설, 하상정비 및 보축, 신림5펌프장 및 신림2펌프장 신설 등	방수로 설치(국가사업) 저류조 설치(1개소, ’15.추진)	‘18년	2,873
강남역 일대	저류조 설치 및 격벽철거(40개소) 등	유역분할 관거(1.23km)	‘18년	646
길동 일대	도로험프 설치	유역분할 관거(3.62km) 등	‘18년	1,196
강서구청 사거리 일대	하수관거 정비(2.18km) 등		‘17년	1,350
시흥사거리 일대	저류조 설치	우회관로 신설(1.5km) 및 하천단면 확장(0.4km) 등	‘17년	504
영림초교 주변	대림3펌프장 증설	유입관로 확장(2km) 등	‘14년상반기	792
성대시장 주변	하수관거 확장(1.28km) 등		‘15년	419
선릉역(포스코사거리주변)	하수관거 신설(1.93m) 및 저류조 설치 등		‘14년	242
대치역사거리 일대	하수관거 정비(0.65km) 및 도곡펌프장 신설 등		‘16년	754
내방역사거리 일대	하수관거 신설(2.1km) 등		‘17년	235
암사역 주변	하수관거 신설(2.38km) 등		‘17년	337
공항펌프장 일대	공항펌프장 증설 및 마곡2펌프장 신설 등		‘15년	56
망원유역(홍대입구역 일대)	하수관거 정비(0.2km)	펌프장 신설 등 유역대책 수립	‘18년	299
오류동역 주변	하수관거 정비(1.78km) 등		‘17년	552
신촌현대백화점 주변	하수관거 정비(1.43km) 등		‘15년	82
가산 디지털단지역 주변	하수관거 정비(2.24km) 등		‘13년완료	255
을지로 입구역 일대	하수관거 신설(0.85km) 등		‘14년	83
풍납 1, 2동 주민센터 주변	풍납펌프장 유입관거 정비(4.99km) 등		‘15년	158
잠원지역 일대	잠원2 펌프장 신설 등		‘16년	209
신천지역 일대	하수관거 정비(4.54km) 등		‘16년	231
공릉초교 주변	공릉2 펌프장 증설 및 유입관로 정비(0.36km) 등		‘15년	402
장안1동 주민센터 주변	장안2, 4펌프장 증설 및 답십리4펌프장 유역분리(0.14km)		‘14년상반기	548
면목동 일대	하수관거 정비(3.1km) 및 면목4펌프장 증설 등		‘13년완료	90
장위동 일대	하수관거 신설(0.45km) 및 장위펌프장 증설 등		‘13년완료	31
미아삼거리역 주변	하수관거 정비(0.73km) 및 송천펌프장 신설 등		‘13년완료	126
용답동 답십리역 일대	신답펌프장 증설 등	하수관거 정비(1.58km) 및 용답펌프장 증설	‘17년	40

2. 대심도 배수터널 건설계획 및 추진현황, 관련 기초자치단체의 입장표명 또는 의견제출 현황

○ 대심도 배수터널 건설계획 및 추진현황

연번	사 업 명	당초계획	추진현황	비 고
1	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	․D=7.5m, L=3.4km ․깊은 지하하수도 ․사업비:1,435억원	․ ’13. 5.27 : 착공 ․ ’16. 5. : 완료예정	공사중
2	광화문지역 배수개선대책	․D=3.5m, L=2.0km ․지하하천+비점오염저감 ․사업비:396억원	․침투․저류․이용 등 친환경 치수대책 시행 ※ 단기대책 : ’11년 완료 ․하수관로 개선,확충등 중기대책 수립중	중기계획 수립중
3	도림천 방수로 설치	․D=3.5~8.5m,L=6.2km ․지하하천 ․사업비:1,664억원	․도림천방수로 D=8.5m, L=3.0km ․관악산방수로 D=3.5m, L=3.2km	기본계획 수립중 (국토 교통부)
4	강남역일대 배수개선대책	․D=7.5m. L=3.1km ․깊은 지하하수도 ․사업비:1,317억원	․배수개선 기본계획 수립중 -’14.5.~6. : 유역분리 및 유역경계 조정 검토중	설계중
5	사당역일대 배수개선대책	․D=6.0m, L=3.7km ․지하하천+다목적 저류조 ․사업비:1,826억원	․유역특성에 맞는 해소대책 기본설계중 - 기간 : ’13.7~’15.2	설계중
6	한강로지역 배수개선대책	․D=7.5m, L=2.0km ․깊은 지하하수도 ․사업비:861억원	․유역분할 하수관거, 펌프장 신설 - 기간: ’13.12~’15.12 - 사업비:502억원	공사착수
7	길동지역 배수개선대책	․D=7.5m, L=1.8km ․깊은 지하하수도 ․사업비:850억원	․유역분할 하수관거 설계중 - 기간 : ’13.12~’17.12.	설계중

○ 기초자치단체의 입장표명 또는 의견제출 현황

- 강남역일대 배수개선대책

․ ’13.08월 서초구 지역주민들이 대심도 터널을 추진요청 하였으나,

․ ’14.4.9. 서초구 지역주민들에게 강남역 일대 배수개선대책 용역추진에 대한 주민설명회를 개최하여, 향후, 전문가, 지역주민 등의 의견 수렴절차를 거쳐 강남역 일대 최적의 배수개선대책(안)을 마련하여 추진할 예정임을 설명함

- 기타 지역, 입장표명 및 의견제출 자치단체 없음.

작성자	기관명	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	안 준 수
	☎ 2133-3863	주 무 관	김 동 철
	작 성 일 : 2014. 10. .