문서번호	급수운영과-24824
결재일자	2014.10.13.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		소장
박종대	김광운	안재엽		10/13 代이만기
협 조

동이로(군자교) 배수관정비공사

설계변경 및 계약금액 검토 보고

2014. 10

동부수도사업소

(급수운영과)

동이로(군자교) 배수관정비공사

설계변경 및 계약금액 검토보고

우리사업소 시행중인 “동이로(군자교) 배수관정비공사”와 관련하여 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경 및 계약금액 조정이 요구되어 이를 검토 보고함.

※관련근거 : 서울시시설관리공단 공사감독2처-16608호

(‘14.10.07, 설계변경(정산) 보고서 제출)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 동이로(군자교) 배수관정비공사

○ 공사기간 : 2014.05.15. ~ 2014.10.30.

○ 계 약 자 : 기아건설㈜ 김은영

○ 공사개요 : D=500㎜, L=1,450m

○ 도 급 비 : 780,719,120원

□ 보고내용

○ 설계변경 사유

- 실정보고 공사감독2처-8755(‘14.06.13)호외 4건

- 횡단굴착 변경(주간 → 야간) 및 유량계실 설치에 의한 물량 증가

- 부단수 연결 및 지장물 하월구간 발생에 의한 물량 증가

- 신규공정 및 신규자재 발생으로 인한 물량 증·감

- 건강, 연금, 노인장기요양 보험료, 퇴직공제부금 및 부지임대료 정산

- 주요 공종 수량 증,감 현황

공 종	단 위	당 초	변 경	증 ․ 감
주철직관 부설공 (100~500mm)	m	1,450	1,492	증) 42
K.P 이탈방지압륜 접합	개소	238	219	감) 19
부단수 제수밸브 설치	개소	-	1	증) 1
원형밸브실 설치공 (D100~300mm)	개소	26	24	감) 2
유량계실 설치공	개소	-	1	증) 1
충진공(D700mm)	m	1,450	1,340	감) 110

- 공사비 증,감 현황

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	780,719,120	738,980,000	감) 41,739,120
공급가액	709,744,655	671,800,000	감) 37,944,655
부가세	70,974,465	67,180,000	감) 3,794,465

□ 조치의견

○ 본 공사는 설계변경 심사 대상에서 제외되므로 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 설계변경의 적정성 및 신규공종 단가적용, 물량 증감 등을 검토하며,

※ 설계변경 심사대상 : 도급비 10% 이상 증가 시(재무회계과-563,‘13.1.15)

○ 설계변경 심의위원회에서 의결한 내용을 토대로 변경계약 및 정산시행에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 설계변경 내역서 1부. 끝.