투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	정산설계변경의뢰(산책로개선)

1. 우리사업소에서 시행중인 『북서울꿈의숲 산책로 개선사업』과 관련하여 정산변경사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 북서울꿈의숲 산책로 개선사업

나. 공사기간 : 2014.06.23. ~ 2014.09.30.

다. 도 급 액 : 금156,971,610원(금일억오천육백구십칠만일천육백일십원정)

라. 도 급 자 : 산림조합중앙회

마. 변경내용 : 붙임 실정검토결과보고 참조

바. 총공사비

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		156,971,610	155,562,610	감) 1,409,000
도급비	공급가액	148,300,000	146,891,000	감) 1,409,000
	부가가치세	8,671,610	8,671,610	0
	계	156,971,610	155,562,610	감) 1,409,000

사. 정산사유 : 고용보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 건설하도급수수료, 건설기계대여대금 등 총 1,184,848원 감액과 그에 따른 제경비 총 1,409,000원 감

아. 예산과목 : 푸른도시국 자연생태과, 생태계복원및보전과야생동물식물보호, 생태계보전사업, 근교산등산로정비, 시설비

붙임 : 1. 정산변경내역서 1부.

2. 제비율검증표 1부. 끝.

	북서울꿈의숲관리사무소장
주무관	황서현		관리팀장	허대수		북서울꿈의숲관리사무소장	10/13 김상근
협조자
시행	북서울꿈의숲관리사무소-6961	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 월계로 173(산28-6)	/
전화	02-2289-4013	/전송	02-2289-4040	/	spinosus@seoul.go.kr	/	대시민공개