투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 뚝섬공원 도로확장 개선공사

1. 시설관리과-2812(2014.10.13.)호와 관련입니다.

2. 시설관리과에서 시행하는『뚝섬공원 도로확장 개선공사』건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체(대표자)	계약금액(원)	공사기간
뚝섬공원 도로확장 개선공사	하웅종합건설(주) (******)	953,070,300	2014.4.17. ~ 2014.11.30.

나. 변경내역 : 계약금액 변경(감 240,163,300*), 준공기한 변경(90일 연기)

구분	계 약 명	계약업체	계약금액(원)	공사기간
변경 전	뚝섬공원 도로확장 개선공사	하웅종합건설(주) (******)	953,070,300	2014.4.17. ~ 2014.11.30.
변경 후	뚝섬공원 도로확장 개선공사	하웅종합건설(주) (******)	*********** ***************	2014.4.17. ~ 2015.2.28.

다. 변경사유

- 인근 주민들의 의견 반영(교통개선공사 제외 : 근본적 개선 요구)

-  공사 중단에 따른 절대공기 부족

붙임 :  1. 변경계약 의뢰공문 각 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 10/13 서영관
협조자	주무관	오상협
시행	총무과-15495	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)