함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[동이로(군자교) 배수관정비공사]

우리사업소에서 시행중인 “동이로(군자교) 배수관정비공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공사명 : 동이로(군자교) 배수관정비공사

나. 도급자 : 기아건설㈜ 김은영

다. 공사기간 : 2014.05.15. ~ 2014.10.30.

라. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 시공물량 증,감 등

마. 설계변경 금액 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
도급비	780,719,120원	738,980,000원	감) 41,739,120원
공급가액	709,744,655원	671,800,000원	감) 37,944,655원
부 가 세	70,974,465원	67,180,000원	감) 3,794,465원

바. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후송배수관)

첨부 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 심의의뢰서 및 심의위원 의결서 각 1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최 결과보고서 1부.  끝.

주무관	박종대		주무관	김광운		급수운영과장	안재엽		소장	10/13 代이만기
협조자	주무관	권영안		주무관	김덕기
시행	급수운영과-24891	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2756	/전송	02-3146-2789	/	jdp1972@seoul.go.kr	/	부분공개