문서번호	토목부-19774
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
손준호		권혁대	10/13 노우성
협조
	주무관		이석우

충정로 중앙정류장 프리캐스트패널 그루빙 검토보고

(마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사)

2014. 10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

『마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사』

프리캐스트패널 시공 정류장에 그루빙 설치 검토보고

충정로 중앙버스정류장은 포장내구성 강화를 위해 프리캐스트패널로 시험 시공하였으나, 미끄러워 버스운행시 안전사고가 우려되어 미끄럼저항성 향상을 위한 종방향 그루빙 설치 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 신촌감 제2014-233호(‘14. 8.12.) : 충정로 프리캐스트패널 그루빙 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 아현삼거리 ～ 서대문구 충정로3가 189

○ 규    모

- 고가차도 철거 : 폭 15m, 연장 469m

- 중앙차로 설치 : 연장 1.2km, 중앙승강장 2개소

○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 10.

○ 총사업비 : 5,179백만원

○ 감리사 : (주)동해종합기술공사 외1, 시공사 : 유호산업개발(주) 외1

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 현황 및 문제점

- 중앙버스정류장의 경우 버스중차량 통행 및 급출발 급제동 등으로 소성변형 및 포장파손이 빈발한 실정으로 포장내구성 향상을 위해 충정로 중앙정류소에 프리캐스트패널을 시공시험 하였으나

- 미끄럼저항성이 낮아 버스운행시 안전사고의 우려가 있음.

○ 조치계획

- 종방향 그루빙을 실시하여 미끄럼저항성 강화

○ 그루빙 설치 위치도

○ 그루빙 설치 전․후 사진

설치전	설치후

○ 그루빙 설치 상세도

- 프리캐스트패널은 특허제품(제10-09896)으로 기 시공한 업체에서 그루빙공사 시행이 타당함.

○ 주요 수량 증․감 현황

구 분	단가적용기준	적용단가	비 고
그루빙 (종방향, 13×6×6×47)	-신규단가 적용: 2014년 상반기 노임단가 및 표준품셈을 적용하여 일위대가 산출 -낙찰율 86.968% 적용	29,648원	㎡당

○ 공사비 증․감 현황                                  (단위 : 원원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	그루빙	-	14,727,273	14,727,273
	부가가치세	-	1,472,727	1,472,727
	계	-	16,200,000	16,200,000

○ 적용단가 검토

- 2014년 상반기 노임단가 및 표준품셈 산출단가에 낙찰율(86.968%)적용

Ⅳ		조 치 계 획

○ 감리단 보고내용을 검토한바 수량 및 시공사유가 타당한 것으로 판단되므로 추후 설계에 반영하여 정산코자 합니다.

붙  임 :  1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 설계내역서 및 도면(별첨).  끝.