투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	하웅종합건설(주)대표 조연하님 귀하
(경유)
제목	공사 설계변경 알림(뚝섬공원 도로확장공사)

1. 귀사에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부에서 발주하여 귀사와 계약한「뚝섬공원 도로확장공사」시행중 민원에 의한 도급금액 및 시공물량 변경에 따른 설계변경사항이 있어 알려드리오니,

3. 재계약 등 관련업무를 조속히 시행하여 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바라며, 아울러 공사중단(5개월)에 따른 공사기간 부족에 대해서도 연장계약(‘14.2.28까지) 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사위치 : 뚝섬한강공원 뚝섬나들목~센터앞까지

나. 사업규모 : 차량도로확장  폭 4 → 7m, 연장 500m

회전교차로 1개소, 주차장 정산소 2개소, 녹지조성 등

다. 사업기간 : 2014. 4. 17 ~ 11. 30

라. 도 급 비 : 953백만원(관급비 311, 이설비 72백만원)

마. 변경사유

- 인근주변 주민들의 의견반영(교통개선공사 제외 : 근본적 개선 요구)

- 공사중단에 따른 절대공기 부족 공사기간 연장

(당초‘14. 4. 17 ~ 11. 30  → 변경‘14. 4. 17 ~‘15. 2. 28)

바. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	변 경(전)	변 경(후)	증 ․ 감	비 고
총공사비	1,476,072,300	1,014,600,000	- 461,472,300
도 급 비	953,073,300	712,910,000	- 240,163,300
관 급 비	310,900,000	192,700,000	- 118,200,000
이 설 비	71,500,000	-	- 71,500,000
폐기물처리비	140,599,000	108,990,000	- 31,609,000

첨 부 : 내역서(변경) 및 수량산출서 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	유충현		시설관리과장	10/13 박희철
협조자	주무관	오상협
시행	시설관리과-2811	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25(강변북로 257)	/
전화	02-3780-0646	/전송	02-3780-0744	/	yooch79@seoul.go.kr	/	대시민공개