문서번호	기전과-7086
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	채희준	10/13 최주용

『2014년 교통안전표지 유지보수공사(연)-2차작업지시』 감리실정 보고서 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

성동도로사업소

(기 전 과)

『2014년 교통안전표지 유지보수공사(연)-2차작업지시』

감리실정보고서 검토 보고

교통안전표지 유지보수공사(연간단가)-제2차 작업지시에 대한 감리원의 공사 실정보고가 있어 의견 검토후 결과 보고드림

□ 관련근거

○ ㈜건영이앤씨 건영 본 2014-118호(2014.10.10.) 실정보고 제출

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 작업기간 : 2014.08.14 ~ 2014.10.14

□ 감리원 의견 및 검토결과

연 번	공 사 내 용	현황 및 문제점	검 토 결 과
규제-2	좌회전금지 표지 철거, 보조표지 철거, 직진 및 우회전 표지, 장애물표적표지 이설	신호기 미작업	토목 및 신호 공사 지연으로 작업지시 제외 함이 타당함
규제-4	횡단보도 표지 신설	노면 미작업	노면공사 지연으로 작업지시 제외함이 타당함
규제-6	횡단보도 표지 신설	신호기 미작업	신호공사 지연으로 작업지시 제외함이 타당함

□ 조치의견

○ 공사실정 보고에 대한 감리원의 의견을 검토한 결과 보고내용에 타당성이 있어 이를 현장여건에 맞도록 설계변경 및 시공토록 감리자에게 지시하고자 합니다.

붙    임 : 1. 2차작업지시 실정보고 1부. 끝.