문서번호	기전과-7087
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	채희준	10/13 최주용

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경 승인 요청에 따른 검토 보고 - 능동로(신호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인에 따른 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

서울지방경찰청 교통관리과-20855호(2014.07.28.)

광진구청 도로과-14158호(2014.10.02.)

�

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 능동로 구조개선 교통안전시설물 설치공사(신호)

공사구간 : 광진구 능동로18(이튼타워리버 3차주변)

공사기간

구분	변경 전	변경 후	변경사유
신호	2014.04.25~2014.07.16	2014.04.25.~2014.10.30	토목공사 지연으로 인한 공기 연장신청

공사참여자

구분	공사참여자			원인자
	시공사	감리사	설계사
신호	우민전기(주)	대영유비텍(주)	㈜동림TNS	광진구청 도로과

Ⅲ		변경요청 검토결과

위치(교차로명)	현황 및 문제점	변경요청의견	검토경과
자양4동 주민센터(보)	토목 set-back 공사에 따른 제어기 및 제어기 및 가공지주 우선 이설	제어기 및 가공지주 이설 및 신호케이블 신설	토목공사 공정에 맞추어 시공이 추진되어야 함으로 승인함이 타당함
자양4동 주민센터(연동)	경차청 규제변경(유턴 폐지)	1면3색 2조 교체→1면4색 2조 이설	경찰청 규제사항으로 승인함이 타당함
	지중화 굴착공사 중 지장물 발생 배관설치 불가	전선관104∅2열→54∅3열로 변경 시공	지장물로 인하여 교체 시공 승인함이 타당함

붙    임 : 1. 원인자부담공사 준공 변경승인 요청 및 실정보고 1부. 끝.