문서번호	시설관리과-27146
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
박영택	손병희	나태산		10/13 代서경만
협 조

보광가압장 모터펌프 교체설치

납품기한 연기 보고

2014. 10.

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

보광가압장 모터펌프 교체설치

납품기한 연기보고

2014년도 추진사업인 「보광가압장 모터펌프 제작구매 철거설치 사업」의 단수가 수반되는 작업인 모터펌프 전‧후단 배관 연결작업을 제외한 모든 설치작업(모터펌프, 밸브, 배관, 전원연결 등)을 완료후 단수작업계획을 수립 추진하여 단수시간을 최대한 줄이기 위해 납품기한을 연기코자 함.

□ 시설현황

○ 위    치 : 용산구 이태원동 126-13

○ 시설용량  : 56kW(75Hp) × 2대, 15kW(20Hp) × 2대

○ 급수지역 : 용산구 한남동, 이태원동 일대

○ 급수현황 : 3,320명

○ 급수방법 : 직접급수(제어방법 인버터)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 보광가압장 모터펌프 제작구매 철거 설치

○ 계 약 자 : 한국펌프공업협동조합 대표 한경수

○ 계약금액 : 금84,000천원

○ 계약일자 : 2014. 06. 23.

○ 납품기한 : 2014. 10. 21.

○ 사업내용

- 모터펌프 철거 : 56㎾(75Hp) × 2대, 15㎾(20Hp) × 2대

- 모터펌프 설치 : 37㎾(50Hp) × 2대

- 기타 배관 철거 설치 : 1식

□ 문 제 점

○ 보광가압장 급수구역은 대단위 지역이며, 직접급수 방식으로서 단수작업이       수반되어 모터펌프 교체 설치 작업과 단수작업계획을 병행 추진시 교체 설치

작업에 차질 발생시, 단수작업계획에 영향을 미쳐 단수일정 변경 등 으로       주민불편 및 행정 신뢰도 저하 초래

□ 대    책

○ 단수작업인 모터펌프 전‧후단 배관 연결작업을 제외한 모든 설치작업        (모터펌프, 밸브, 배관, 전원연결 등)을 완료후 단수작업계획을 수립하여       모터펌프 전‧후단 배관 연결작업을 함으로써 단수시간을 최대한 줄여서         주민불편을 최소화 하고자 납품기한을 연기코자 함

□ 납품기한 연기

○ ****

- 단수가 수반되는 작업인 모터펌프 전‧후단 배관 연결작업을 제외한 모든          설치작업(모터펌프, 밸브, 배관, 전원연결 등)을 완료후 단수작업계획을           수립 배관 연결작업을 함으로써 단수시간을 최대한 줄이기 위함

○ 납품기한 연기

- 당초 : 2014. 10. 21. ⇒ 변경 : 2014. 11. 21.

○ 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 중부수도사업소

- 부과여부 : 미부과. 끝.