다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)디자인팩토리
(경유)
제목	성수 수제화거리 안내시스템 디자인개발 용역 변경계약 및 의견청취회 결과 통보

1. 성수 수제화거리 안내시스템 디자인개발 용역과 관련입니다.

2. 귀사에서 진행하고있는「성수 수제화거리 안내시스템 디자인개발 용역」의 준공기한이 아래와 같이 변경되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바라며,‘14.10.6(월)에 개최된 현장 의견청취회 결과(붙임참조)를 과업진행 시 반영하여 차질없이 진행하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 성수 구두거리 안내시스템 디자인개발 용역

나. 계약업체 : *****************

다. 계약금액 : ******************

라. 변경계약일 : 2014.10.10

마. 준공기한 : 2014.10.16.(변경전)→ 2014.11.30.(변경후)

붙임 : 1. 변경계약체결통보서 1부.

2. 의견청취회 결과서 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이선미		시설물디자인팀장	장영호		공공디자인과장	10/13 박내규
협조자
시행	공공디자인과-13558	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 공공디자인과	/
전화	2133-2765	/전송	2133-1066	/	nasm78@seoul.go.kr	/	부분공개