문서번호	토목부-19709
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
손준호		권혁대	10/13 노우성
협조
	주무관		이석우

교통안전시설 설계 및 감리비 반영 검토보고

(마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사)

2014. 10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

『마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사』

교통안전시설 설계 및 감리비 반영 검토보고

교통안전시설공사는「교통신호기공사 업무처리 가이드라인」에 따라  경찰청 규제심의결과를 바탕으로 실시설계 후 시공감리를 통해 공사 시행토록 되어 있으나 도급내역에 누락되어 반영코자 보고드림.

Ⅰ		관련근거

○ 신촌감 제2014-257호(‘14.10.8) : 교통안전시설 설계 및 감리비 반영 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 아현삼거리 ～ 서대문구 충정로3가 189

○ 규    모

- 고가차도 철거 : 폭 15m, 연장 469m

- 중앙차로 설치 : 연장 1.2km, 중앙승강장 2개소

○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 10.

○ 총사업비 : 5,179백만원

○ 감리사 : (주)동해종합기술공사 외1, 시공사 : 유호산업개발(주) 외1

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 교통안전시설 대상공사 현황

- 아현고가 철거공사 및 충정로 중앙차로 최초 및 변경규제 사항

․차선도색, 노면표시, 교통안전시설, 신호기 공사 등

○ 교통안전시설 실시설계 및 감리용역비 반영필요

-「서울시 교통신호기공사 가이드라인」에 따라 교통안전시설은 경찰청 규제심의 결과에 의거 실시설계 시행후 도로사업소의 승인을 득한후 시공감리를 통해 시공토록 되어 있으나 본공사 설계내역서에 누락되어 있어 반영함이 타당함.

※ 실시설계와 감리는 자격요건을 득한 업체만 가능

○ 실시설계비 및 감리비 산출근거 검토

- 실시설계비

구 분	공사비 요율방식	실비정액가산방식	비고
노면 및 표지판 설치공사	33,000,000	42,200,000	적용공사비: 919,167,324원 적용요율: 3.62%
교통신호기 설치공사	26,000,000	37,800,000	적용공사비: 686,934,167원 적용요율: 3.79%
공급가액	59,000,000	80,000,000
부가가치세	5,900,000	8,000,000
설계용역비	64,900,000	88,000,000
적용용역비	○		단가가 저렴한 공사비요율방식 적용

※ 공사비요율방식은 엔지니어링 사업대가 기준 적용

※ 실비정액가산방식은 실투입되는 인원에 대한 인건비 산출

- 감리비

구 분	공사비 요율방식	직접비 기준	비고
노면 및 표지판 설치공사	15,000,000	20,000,000	적용공사비: 919,167,324원 적용요율: 1.69%
교통신호기 설치공사	18,500,000	14,000,000	적용공사비: 686,934,167원 적용요율: 2.70%
공급가액	29,000,000
부가가치세	2,900,000
감리용역비	31,900,000		노면 및 표지판: 공사비요율방식 적용 교통신호기: 직접비 기준방식 적용

※ 감리비는 공사비 요율 방식과, 직접비 기준 방식을 비교 검토하여 더 저렴한 비용을 적용하여 감리비 산정

○ 공사비 증․감 현황                                  (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	교통안전시설물 설치공사 설계용역비	-	59,000,000	59,000,000	제‧요율 제외공종
	교통안전시설물 설치공사 감리용역비	-	29,000,000	29,000,000	제‧요율 제외공종
	공급가액	-	88,000,000	88,000,000
	부가가치세	-	8,800,000	8,800,000
	계	-	96,800,000	96,800,000

※ 용역비 반영사항이므로 간접비등 제요율 제외공종으로 반영

Ⅳ		조 치 계 획

○ 감리단 보고내용을 검토한바 교통안전시설 실시설계비 및 감리용역비 반영이 타당한 것으로 판단되므로 추후 설계에 반영하여 정산코자 하며

○ 토목공사비가 아닌 엔지니어링 사업대가기준에 의한 용역비에 관한 사항으로 설계변경소위원회 상정은 제외코자 합니다.

붙  임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.