문서번호	시설과-7158
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		함석주	10/14 이용태
협조
	주무관		남상국

남산숲 어린이집 녹색자금사업

설계변경내용 검토보고

2014. 10.

중부공원녹지사업소

시설과

남산숲어린이집 녹색자금사업

설계변경내용 검토보고

남산숲어린이집 녹색자금사업과 관련하여 도급사로부터 설계변경내용 검토 요청이 있어 다음과 같이 설계변경내용을 검토 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남산숲 어린이집 녹색자금사업

○ 공사기간 : 2014. 7. 30 ~ 10. 15

○ 도 급 자 : 현도종합건설(주) 대표 최태진

○ 도 급 액 : 금93,598,000원

□ 설계변경사항

○ 변경내용

구분	설계변경(안)	비고
식재	▶ 녹지대 정리후 현장여건에 따른 물량 재조사 등으로 변경 - 교목 : 16주 → 20주 - 관목 : 0주 → 370주 ▶ 현장여건 등 수목생육을 고려하여 교목 규격 조정 - 전나무, 측백나무 : H3.0 → H2.0 - 대추나무, 매화나무, 산수유, 이팝나무 : R15 → R8 - 산딸나무 : R12 → R8 - 왕벚나무 : B12 → B8 - 때죽나무 : R15 → R10 ▶ 현장여건 및 어린이집 요청 등을 고려하여 식재 조정 - 사철나무(H1.2×W0.4): 200주 → 0주 - 산철쭉(H0.3×W0.3): 0주 → 400주 - 산철쭉(H1.0×W1.0): 0주 → 60주 ▶ 플랜터 내 식재물량이 없어 초화류 식재 추가(어린이집 요청) - 구절초(3치포트): 0본 → 120본 - 벌개미취(8cm): 0본 → 120본 - 사철채송화(8cm): 0본 → 210본 - 원추리(2~3얼분): 0본 → 100본 ▶ 식재지가 경사면이므로 유실예방 등을 위해 식생매트로 변경 - 꽃잔디(3치포트) → 꽃잔디(식생완성형매트) - 맥문동(3~5얼분*8cm) → 맥문동(식생완성형매트) - 비비추(4~5얼분*10cm) → 사초(식생완성형매트) - 수크령(8cm) → 수크령(식생완성형매트) - 수호초(4치포트) → 수호초(식생완성형매트) ▶ 데크구간 및 계단사이구간 잔디식재 추가 - 잔디(중지, 40*100): 0㎡ → 27㎡ - 잔디보호매트(500*500*31): 0㎡ → 27㎡ - 잔디(평떼, 0.3*0.3*.0.03): 0㎡ → 7㎡ - 마사토포장(T100) : 26㎡ → 0㎡	시설과-6799 (2014.9.29.)호 및 시설과-7033 (2014.10.8.)호 등 기 보고사항으로 현장여건에 맞게 변경
시설물	▶ 목재데크 내구성 및 안전 등 현장여건에 맞게 규격 및 물량조정 - 앉음벽A : 방부목재 → 각관, 콘크리트기초 → 삭제 - 앉음벽, 목재계단, 목재데크 각관 규격 : 50*50(30*30)*T1.6 → 50*50*T2.3 - 목재데크A(데크중앙발판) : 2.1㎡ → 5.1㎡ - 목재데크B(계단하부, 계단상부, 데크중앙) : 7.8㎡ → 11.3㎡ - 목재난간(H700) : 0m → 3.6m - 목재난간(H400) : 0m → 9.3m ▶ 휀스 노후에 따른 철거후 물량삭제 - 휀스도색 : 38m → 0m ▶ 경사면 토사유실 예방을 위한 계단돌 활용구간 조정 - 계단돌쌓기 : 12m → 31m
배수	▶ 배수관 유출구 확보에 따른 배수방법 개선 - 연결관(D200) : 0m → 20m - 집수정(H600) : 0개소 → 3개소 - 자갈깔기(T300) : 8㎡ → 0㎡
제경비	▶ 보험료 누락으로 산입(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준) -건강보험료: 0원 → 523,240원 -연금보험료: 0원 → 766,393원 -노인장기요양보험료: 0원 → 34,272원 -건설하도급대금지급보증수수료: 45,728원 → 0원

○ 변경금액

구 분		금 액			비고
		계약금액	변경금액	증 감
총 공 사 비		106,576,260	118,457,860	증 11,881,600
도급비	공급가액	85,089,091	84,070,373	감 1,018,718
	부가가치세	8,508,909	8,407,037	감 101,872
	계	93,598,000	92,477,410	감 1,120,590
관급자재비		12,978,260	25,980,450	증 13,002,190

※ 제비율검증 원가관리시스템상에 보험료 누락부분 입력시 과다산출로 입력이 불가하여 보험료 삭제후 제비율검증을 실시함.

□ 보고자 의견

○ 기 실정보고시 승인하고 보고된 사항으로 어린이집 요구사항 등을 반영하여 위와 같이 설계변경을 시행하고, 추가 소요예산은 본 사업의 집행잔액(낙찰차액) 등을 활용하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 공문(도급사) 1부.

2. 설계변경내용 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 제비율검증 1부.

5. 도면(별첨) 1부.  끝.