투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	광진구청장(도로과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 변경요청 승인알림(능동로-신호)

1. 서울지방경찰청 교통관리과-20855호(2014.07.28.) 및 광진구청 도로과-14158호(2014.10.02.)와 관련입니다.

2. 위 호의 교통안전시설물 원인자 부담공사 변경요청을 아래와 같이 승인 하오니「교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항」에 알맞게 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 능동로 구조개선 교통안전시설물 설치공사(신호)

나. 공사위치 : 광진구 능동로18(이튼타워리버3차 주변)

다. 공사기간 변경 및 공사참여자

구분	시공	설계	감리	원인자	공사기간		변경사유
					변경전	변경후
신호	우민전8기(주)	㈜동림TNS	대영유비텍(주)	광진구청 도로과	2014.04.25.~2014.07.16	2014.04.25.~2014.10.30	토목공사 지연으로 인한 공기 연장

라. 변경내용

위 치	작업내용 및 현황	감리자 의견	검 토 결 과
자양4동 주민센터(보)	토목 set-back 공사에 따른 제어기 및 가공지주 우선 이설	제어기 및 가공지주 이설 및 신호케이블 신설	감리의견 적합하여 승인함
자양4동 주민센터(연동)	경찰청 규제변경(유턴폐지)	1면3색 2조 교체→1면4색 2조 이설	감리의견 적합하여 승인함
	지중화 굴착공사 중 지장물 발생 Φ104 배관설치 불가	전선관 Φ104 2열→Φ54 3열 시공	감리의견 적합하여 승인함

. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	차준원		주무관	채희준		기전과장	10/14 최주용
협조자
시행	기전과-7117	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개